문서번호	토목부-10718
결재일자	2020.6.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		장수철	06/02 김용제
협조

물가변동(E/S)으로 인한 계약금액 조정(제1회) 검토보고

【개봉고가 성능개선공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 6.

도시기반시설본부

토 목 부

-개봉고가 성능개선공사-

물가변동(E/S)으로 인한 계약금액 조정(제1회) 검토보고

우리 본부에서 시행 중인『개봉고가 성능개선공사』의 계약상대자로부터 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회) 요청에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

❍ 홍익20-08(’20. 4. 24.) 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청

❍ 도기본-20-4954(’20. 4. 24.) 물가변동 계약금액 조정 검토 요청

❍ 유신개봉20-53(’20. 5. 11.) 물가변동으로 인한 계약금액 검토 보고

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 개봉고가 성능개선공사

❍ 공사규모 : 교량성능개선(DB18→24) 폭 18.9m, 연장 332m

❍ 도 급 비 : 12,278백만 원

❍ 공사기간 : 2019. 8. 12.~2023. 4. 11.

❍ 시공사/감리단 : 홍익산업개발㈜ 외 1 / ㈜유신 외 2

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정대상 여부

❍ 조정요건 충족 여부 : 기준시점 이후 90일 경과 및 지수조정률 3% 이상

구분	제1회	비고
기준시점(직전 조정기준일)	2019. 7. 31.	계약체결일
비교시점(조정기준일)	2020. 1. 1.
경과기간	154일	90일 이상
지수조정률	3.50%	3% 이상 만족

□ 등락요건 및 기간요건 기준

조정방법	등락요건	기간요건	비고
입찰 및 계약 집행기준 제1장제6절 물가변동 조정률 산출	직전 조정기준일을 기준으로 산출된 지수조정률이 100분의 3 이상 증감	직전 조정기준일을 기준으로 90일 이상 경과	2개의 조건이 충족되는 날을「조정기준일」

□ 물가변동으로 인한 계약금액의 조정내역

구분	검토내용	비고
①물가변동 대상공사 계약금액(B)	12,278,000,000
②물가변동 적용제외 계약금액(C)	302,652,900	공정이행금액, 기성금
③물가변동 적용대가(D)	11,975,347,100	‣ D=(B-C)
④물가변동 조정률(A)	3.50%	‣ 종합의견서 참조
⑤물가변동 등락대상 조정금액(G)	419,137,000	‣ G=(A×D) (천원단위 절사)
⑥선금급 공제금액(F)	-	‣ 해당없음
⑦물가변동 조정 적용금액	12,697,137,000	‣ ⑦=(B+G)

□ 공사비 조정금액

(단위: 천원)

구분	계약금액	대상금액	지수 조정률	조정금액	선급금 공제액	변경예정 계약금액
제1회	12,278,000	11,975,347	3.50%	419,137	-	12,697,137

□ 건설사업관리기술인 검토의견

❍ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 결과 조정의 타당성, 지수조정률 산정방법, 물가변동 적용대상 금액 산출방법, 선급금 공제금액 및 물가변동 조정 적용금액 산정방법 등은 적정함.

□ 조치계획

❍ 물가변동으로 인한 계약금액 조정에 대하여 관련 규정에 따라 검토한 책임건설사업관리기술인의 의견은 적정하므로 추후 설계 변경 시 반영하고자 함.

붙임  건설사업관리기술인 검토의견서 1부.  끝.