투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)	마곡사업부장, 안전시설검사부장
제목	교통안전시설물(표지) 원인자부담공사 공사기간 연장승인 통보(양천로우회도로폐지)

1. 귀 사(기관)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 교통관리과-28082(2017.09.28.)호

나. 마곡사업부-2723(2020.05.29.)호

다. 안전시설검사부-2667(2020.05.29.)호

3. 위 호와 관련된 교통안전시설 원인자부담공사에 대하여 아래와 같이 공사기간 연장 승인     함을 통보합니다.

가. 공 사 명 : 양천로 일부 도로신설 후 우회도로 폐지 공사

나. 공사장소 : 강서구 마곡동 일원(양천로)

다. 공사내용 : 교통안전표지 설치

라. 원 인 자 : 서울주택도시공사

마. 연장사유 : 노후지주, 안전표지 교체 및 T-GIS 자료입력 절대공기 부족

바. 공사기간 연장승인 내용

구 분	승 인 전	승 인 후	비 고
공사기간	2020.04.10. ~ 2020.05.31.	2020.04.10. ~ 2020.08.30.	92일 증

붙임 : 공사기간 연장요청 및 감리사 검토의견서 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서울주택도시공사 사장,도로교통공단이사장(서울특별시지부장),서울특별시지방경찰청장(교통관리과장),서울강서경찰서장(교통과장),서울특별시장(교통운영과장)
주무관	이성도		기전과장	전결 06/02 서승완
협조자
시행	기전과-4987	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	lsd2000@seoul.go.kr	/	대시민공개