문서번호	한양도성도감-5850
결재일자	2020.6.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
왕승찬		정일선	06/03 안중호
협 조

1차 공사 실정보고 검토결과 보고(제12회)

(남산 회현자락 한양도성 현장 유적전시관)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 6.

문  화  본  부

(한양도성도감)

1차 공사 실정보고 검토결과 보고(제12회)

(남산 회현자락 한양도성 현장 유적전시관)

「남산 회현자락 한양도성 현장유적전시관」조성공사와 관련하여 해당 감리자로부터 제출된 실정보고 사항에 대한 검토결과를 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공사명: 남산 회현자락 한양도성 현장유적전시관 조성공사

□ 위  치: 중구 소파로 46외 13필지(43,630㎡)

□ 계약금: 3,528,933,000원

□ 공사기간: 2018.11.23. ~ 2021.2.16. (1차 2020.6.19.)

□ 시공자: 원택건설(주) 대표 ***, 명헌건설(주)

□ 감리자:(주)금성종합건축사사무소 대표 **************

Ⅱ		실정보고 내용

□ 실정보고 근거

- 공사계약 일반조건 제19조(설계변경 등)

- 서울특별시 공사계약 특수조건 제13조(발주기관의 필요에 의한 설계변경)

□ 실정보고 사유

- 발주자 추가공사 요청사항

- 발주자 건설재료(잔디품종, 배수로 재질 변경 - 예산절감)

- 공사내역 누락분 반영(조경석 해체 운반)

□ 감리자 검토의견

※ 남산감리 제20-14호 및 감리검토의견서 제20-9호

- 분야별 공사비 증감액은 적정하게 산정·검토되었으며 조경석 해체 운반비는 준공전 실제 운반량을 확인하여 정산함이 타당함

□ 설계변경 추정내역

(단위:원)

공 종	변경전	변경후	공사금액		비 고
			변경전	변경후
건축	-	방공호 내부 폐자재정리 청소 및 소운반	-	1,938,270	증)15,001,430
		방공호 입구 사토정리 및 파손캐노피 복구	-	5,067,900
		방공호 주변 토질개선 및 석재굴취 및 석축복구	-	7,995,260
문화재	-	현장내 석축돌 선별·운반 및 쌓기	-	5,665,750	증)5,665,750
조경	-	나무이식 소나무 굴취·반출 38주 소나무 굴취·이식 11주 벚나무 굴취·이식 3주	-	36,593,960	증)36,593,960
		잔디품종 변경 (밀록 → 토종잔디)	100,304,150	68,004,500	감)32,299,650 서울시 요청
		분수대 방수 (유적 빗물 침투방지)	-	16,733,650	증)16,733,650
		유지보수용 잔디차도 (잡석다짐후 잔디식재)	-	1,810,480	증)1,810,480
		기존 등산로 파손계단 복구(계단, 핸드레일)	-	2,472,540	증)2,472,540
		우배수 시설 폭우대비 우배수로 추가 (집수정, 빗물받이, 유공관, 잔디수로, 경계석)	11,331,700	27,674,390	증)16,342,690
		배수로 재질변경 (스텐레스 → 콘크리트)	92,084,820	38,460,940	감)53,623,880 서울시 요청
		도로변 조경석 해체 운반(276.5톤, 철거 상차, 운반)	-	5,103,760	증)5,103,760
		오수관로 내역수량 오류 정정 (당초 수량 1m → 63m)	16,810	1,059,210	증)1,042,400
합 계 (직접공사비)			203,737,480	218,580,610	증)14,843,130

Ⅲ		처리의견

□ 실정보고 내용은 우리시의 요청에 따른 추가공사와 내역 누락분을 반영하는 내용이며 감리원의 검토결과 공사비의 증감액은 적정하게 조정·산정되었으므로 실정보고 승인하고 계약심사를 거쳐 설계변경처리하고자 함

붙임 1-1 감리자 실정보고 제출공문 1부

1-2 감리원검토의견서 1부

2 시공자 실정보고 및 내역서 1부.  끝.