(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사(조경)

공사개요

· 위    치 : 종로구 새문안로 37번지 일대

· 규    모 : 벽면녹화 및 옥상정원 등 1,000㎡

· 공사기간 : ‘19.11.11.~’20.6.18

· 도 급 비 : 1,079백만원

· 시공사 : (유)연일종합조경 외 2

· 감리단 : 서울시설공단 외 1

· 설계사 : ㈜그람디자인 외 1

실정보고 건명

사업계획 변경 및 현장여건 반영

실정보고 사유

1) H동 가로정원 공사부분 제외[조경과-4753(20.3.30)]

2) D동 옥상정원 축소[도시공간개선단-6083(20.5.13)]

3) 현장여건 반영

서울시공단

검토의견

발주처 사업계획 변경 및 현장여건을 반영한 사항으로 원할한 공정추진을 위해 우선 시행하고 향후 설계변경 반영함이 적정하다고 사료됨.

공기에 미치는 영향

해당없음

변경(안)

구분		당초	변경	비고(증감)
H동 가로정원 제외		1식	-	종로구청에서 별도시행
D동 옥상정원 축소		1식	-	열린위원회게획과 간섭
[D동 난간정원]	줄사철 헤대라 난간형 플랜터	110본 110본 H300*W300	660본 300본 H350*W380	단열 및 토심확보
[H동 난간정원]	줄사철 헤대라 난간형 플랜터	40본 40본 H1100	270본 100본 H1250	방근시트 보완
[D동 지상정원]	에메랄드그린 블루엔젤 은사초 경계엣지(STS 5T)	5주 0주 120본 0m	- 5주 600본 4.0m	경사로 토사유실 방지
보행안전도우미(30일) 보행안전도우미(1일)		2인 -	- 30인	경비처리
금액		701,865,720원	662,126,141원	(감)39,739,579원

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    ),당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

해당사항 없음

발주처

검토의견

사업계획 변경 및 현장여건을 반영한 사항으로 서울시설공단의 검토의견을 반영함이 타당하며, 일부 식재수종 변경은 설계의도를 감안하여 당초 계획대로 하고자 조건부 승인코자 함

‣승인조건 : D동 지상정원 식재수종(에메랄드그린 → 블루엔젤)은 변경없이 당초 계획대로 식재

비 고

붙임 : 실정보고 검토 보고서 1부.

결재

주무관

손병도

공원시설과장

이병호

방재시설부장

전결 06/03

박홍봉

협조

주무관

김희숙