문서번호	조경과-7849
결재일자	2020.6.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경협력팀장	조경과장
유승아	김상주	전결 06/03 문길동

2020년 공동체정원 조성 주민제안사업

사업계획 변경 요청에 따른 검토보고(노원구)

2020. 5.

푸른도시국

[조  경  과]

2020년 공동체정원 조성 주민제안사업

사업계획 변경 요청에 따른 검토보고(노원구)

2020년 공동체정원 조성 주민제안사업 지원 관련 보조금 단체의 예산 집행계획 변경에 대하여 자치구로부터 변경 승인 요청이 있어 검토보고 드림

□ 지원사업 개요

❍ 사 업 명 : 사계절 꽃이피는 아름다운 아파트 만들기

****************************

********************************

❍ 사업내용 : 아파트 내 나대지 정원 조성 및 입주민 소통공간 마련

***********************************************

❍ 협약 자치구 : 노원구(공원녹지과)

	2020년 공동체정원 조성 주민제안사업(보조금분야)
❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 11. ❍ 선정단체 : 24개 자치구 49개 공동체 ❍ 총사업비 : 700백만원(자치단체경상보조금) ❍ 사업내용 : 생활 속 꽃과 나무를 심고 가꾸는 공동체에게 보조금 지원

□ 변경사항

❍ 변경내용 : 사업계획 변경으로 인한 예산 비목간 배분변경(사업진행비 → 재료비)

❍ 변경사유

- 코로나 19 심각단계 격상에 따른 꽃심기 행사 진행이 불가함에 따라 행사 시 집행예정인 식비를 식물재료비로 변경편성코자 함

- 사업진행비와 재료비 예산 증감

❍ 세부 변경사항

(단위 :천원)

비 목	세부항목	보조금		자부담		비고
		변경 전	변경 후	변경 전	변경 후
계		13,720	13,720	4,310	4,310
재 료 비	식물재료비	10,760	10,760	440	1,240
	기반조성재료비	2,960	2,960	2,090	2,090
사업진행비	식비 등	-	-	1,100	300
활동비	간담회비 등	-	-	680	680

❍ 자치구 검토결과

- 코로나 19 심각단계 격상에 따라, 꽃 심기 행사 진행을 불가피하게 취소하여

식물재료비로 변경 편성하고자 하여 사업추진코자함.

□ 검토결과

❍ 보조비목(재료비, 사업진행비)간 예산 변경 사항이나, 변경액이 총 보조사업비의 10%미만이며 코로나 19 심각단계 격상에 따른 확산예방을 위하여  부득이 사업 집행계획을 변경한 사항으로 승인코자 함

□ 향후계획

❍ 검토결과 및 변경승인 통보(시 → 노원구)

붙임 : 자치구 공문 1부.  끝.