문서번호	시설과-2366
결재일자	2020.6.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설관리부장
박상권	송병욱	06/03 신용철
협 조
	시설팀장		최이영

배드민턴장 노면정리 및 수목식재 민원관련 실정보고(수유6 배수지)

2020. 6.

시설관리부

[시 설 과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『수유6배수지 건설공사』

배드민턴장 노면정리 및 수목식재 민원관련 실정보고

배수지 상부 배드민턴장 이용 주민들의 노면정리 요구사항 및 인접주택 거주자들의 사생활 보호대책 요청 민원에 대한 검토내용을 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 수유6배수지 건설공사

○ 공사개요 : 배수지 확충 3,100㎥(기존 3,000㎥ → 6,100㎥)

송배수관 부설 D=500~600㎜, L=990m

○ 공사기간 : 2017.12.13. ~ 2020. 6.15.

○ 도 급 비 : 2,861백만원(4차 : 208백만원)

○ 시 공 사 : 영동건설㈜ 외 1개사  대표 손병회

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사  대표 이상민

보고내용

○ 배수지 상부 설치 예정인 배드민턴장 이용 주민 요구사항인 노면 정리 및 배수지 인접주택 사생활 보호를 위한 수목 식재 민원 검토 사항임.

- 배수지 상부 배드민턴장 노면정리 및 경계석 및 측구 원상복구 요청

- 배수지 인접주택 사생활 보호를 위한 조경 공사 추가 요구

***********************

○ 현황사진

지역주민 현장방문(5.26)	배수지 인접주택 수목 식재요청

○ 공사비 검토

공종명	규 격	단위	당 초		변 경		증 · 감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계						14,600,000		14,600,000
1. 직접공사비						9,996,146		9,996,146
우수배제공
L형측구설치	200×250×1000	m			10	205,310	10	205,310
도로경계석설치	180×200×1000	m			20	321,860	20	321,860
포장공
보도경계석설치	150×150×1000	m			101	2,515,708	101	2,515,708
콘크리트블럭포장	200×200	㎡			17	403,716	17	403,716
마사토포장	T=10cm	㎥			48	1,178,112	48	1,178,112
부대공
산딸나무	H3.0×R15	주			8	1,636,840	8	1,636,840
잔디	0.3×0.3×0.3	㎡			200	1,264,400	200	1,264,400
맥문동	8cm	본			3000	1,797,000	3000	1,797,000
사급자재
보차도경계석	200×250×1000	EA			10	261,800	10	261,800
보도경계석	180×200×1000	EA			20	411,400	20	411,400
2. 제잡비		식				4,603,854		4,603,854

실정보고 검토 내용

1) 공사반영 내용

○ 배드민턴장 노면정리

- 마사토포장 : 48㎥

- 도로경계석 및 보도 경계석 설치 : 121m

- L형측구 설치 : 10m

○ 배수지 주변 주택 차폐용 조경공사

- 조경공사 : 산딸나무 8주등 조경공사 시행

2) 민원내용

○ 배수지 상부에 설치중인 배드민턴장과 관련하여 이용주민들로부터 시설물 설치로 철거된 배드민턴장 원상복구 민원 및 배수지 인근 주택 창문으로 사생활 노출 우려로 주택주변 추가 조경공사 민원을 반영한 검토 사항임

- 설계단계에서 배드민턴장 라인 및 배드민턴지주 재설치가 반영되었으나 배드민턴장 경계석 재설치 등 원상복구 민원을 반영한 추가공사 반영 필요

- 배수지 주변 수목이 통합변실 설치로 철거되어 주변주택 사생활 보호를 위해 조경공사 반영 필요

건설사업관리 기술자 검토내용

○ 배수지 상부 배드민턴장 이용주민들 민원 및 인근주택 사생활 보호를 위한 배드민턴장 노면정리 및 배수지 주변 추가 조경공사가 필요함

관련법령 근거

○ 설계변경

- 지방자치단체입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 1항, 설계변경 가. 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다.

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우.

4) 그밖의 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

조치의견

○ 상기와 같이 배수지 상부 배드민턴장 노면정리 및 인근주택 민원사항을 반영한  실정보고 사항은 건설사업관리기술자의 검토가 타당하고, 공사계약일반조건에 적정하므로 실정보고 사항을 승인코자 하오며,

○ 공종별 건당 3천만원 이하로 계약금액조정 심의 소위원회 검토결과에 따라 설계변경에 반영코자 함.

붙임  실정보고 관련서류 1부.  끝