문서번호	도로보수과-5262
결재일자	2020.6.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
김기수	송광석	양기승	06/03 송만규
협 조

도로교통 소통 개선사업 추진계획

(송파구 방이시장사거리 등 6개소)

2020. 06.

동부도로사업소

(도로보수과)

도로교통 소통 개선사업 추진계획

도로교통 소통 개선사업 예산 재배정에 따른 추진계획 보고임(송파구 방이시장사거리 등 6개소)

1		관련 근거

도로교통 소통 개선사업 예산 재배정(방이시장사거리 등 6개소)

【자전거정책과-5450호(2020.05.12.)】

2		추진 계획

재배정 예산: 84,260천원

사업 내용

연번	자치구	지점명	개선내용	소요예산(원)	비고
계				84,260,000
1	송파구	오금로 방이육교	차로선형조정	8,150,000
2	〃	방이시장 사거리	횡단보도 신설	6,790,000
3	〃	삼전동우체국앞사거리	횡단보도 신설	12,970,000
4	〃	삼전동주민센터사거리	횡단보도 신설	15,410,000
5	〃	아시아선수촌아파트	보행섬 신설	38,050,000
6	〃	올림픽 남4문 사거리	좌회전 차로 연장	2,890,000

사업 규모(노면표시)

- 노면표시: 도색신설 9,922m, 제거 5,369m

- 신호기 및 안전표지: 기전과 별도시행

세부 추진계획

- 토목공사(송파구), 교통안전표지, 신호기(기전과) 병행으로 해당 사업 완료 후 시행

- 사업의 적기 및 효율성을 위해 진행중인 사업[2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)]에 포함하여(관급자재 포함) 정비하고 추후 설계변경 및 정산

예산과목 : 도시교통실 교통운영과, 도시교통 체계 및 소통 개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통 소통 개선, 시설비

3		향후 계획

2020. 7. ~ 10.: 공사 시행

2020. 6~7. : 설계변경(구청 토목공사 완료후 예정임)

2020. 10. : 공사완료

붙임 : 1. 관련근거 1부.

2. 산출내역서 각 1부.

3. 도면 각 1부. 끝.