문서번호	치수과-2258
결재일자	2020.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수과장	시설부장		한강사업본부장
방호익	손창열	代손창열		05/29 신용목
협 조
	총무과장		이상이
	기획예산과장		문영일

『한강 준설(저수로) 정비공사』

설계변경 시행(1회) 보고

2020. 5.

한강사업본부

(시설부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『한강 준설(저수로) 정비공사』

설계변경 시행(1회) 보고

「한강 준설(저수로) 정비공사」의 설계변경(1회) 시행 계획에 대하여 보고 드림.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 한강 준설(저수로) 정비공사

○ 위    치 : 한강 저수로(지천합류부, 본류 등)

○ 사업기간 : 2020. 3. 23. ~ 2020. 11. 17.

○ 사 업 비 : 1,534백만원(도급비 1,534백만원)

○ 계약상대자 : (주)관악산업 대표 이규형

○ 공사개요

- 저수로 준설 및 사토 운반 : 36,340㎥

- 기타 부대공 1식

2		설계변경 개요

○ 관련근거(감리단 실정 보고)

- 한강갑문 저수로 준설 검토 보고(치수과-1484, 2020.4.8.)

- 낙찰잔액(잔여예산) 사용계획 보고(치수과-1893, 2020.5.11.)

- 한강갑문 합류지점(모래섬) 추가물량 검토 보고(치수과-2082, 2020.5.19.)

○ 설계변경 사유

- 낙찰잔액(잔여예산) 사용계획에 따른 변경

- 한강갑문 합류지점 추가물량 작업시행 및 반영

- 사토 반출 운반 변경(당초: 야간 ⇒ 변경: 주간) 반영

- 기타 물량 증 · 감 사항 반영

- 설계변경 자문위원회 심의결과 원안 가결(붙임참조)

○ 수량	변경내역

공 종		단 위	당 초	변 경	증 · 감
수량 변경	안양천 하구	㎥	7,500	6,840	감	660
	홍제천 하구	㎥	1,000	-	감	1,000
	여의하류(서울마라나)	㎥	14,700	4,250	감	10,450
	만초천 하구	㎥	4,340	9,860	증	5,520
	당산수상택시 승강장	㎥	4,000	1,850	감	2,150
	잠실수상택시 승강장	㎥	4,700	7,900	증	3,200
	사토육상운반(야간 L=32.18km)	㎥	36,240	-	감	36,240
신규 공종	한강아라갑문 합류부	㎡	-	19,700	증	19,700
	사토육상운반(주간 L=32.18km)	㎡	-	50,400	증	50,400

○ 직접공사비 변경내역                                 (단위:원)

공 종	수량	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	증,감
계							증)	238,100,000
1. 준설공	1	식	40,153,920	35,551,440	266,739,800	342,445,160	증)	97,203,940
	1		55,843,200	49,442,400	334,363,500	439,649,100
2. 사토운반공(육상)	1	식	-	-	640,252,080	640,252,080	증)	110,909,520
	1		-	-	751,161,600	751,161,600
3. 부대공	1	식	-	-	125,280,043	125,280,043	감)	8,601,344
	1		-	-	116,678,699	116,678,699
4. 간접비(연금보험료 등)	1	식	-	-	427,012,717	427,012,717	증)	38,587,884
	1		-	-	465,600,601	465,600,601

○ 소요예산 변경내역                                  (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총공사비	1,534,990	1,773,090	증) 238,100
도 급 비	1,534,990	1,773,090	증) 238,100

3		조치계획

○ 상기와 같이 설계변경 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

○ 설계변경 사항을 감리단에 통하하여 조속한 변경계약 시행.

붙 임 : 1. 관련 보고서 각 1부

2. 변경 내역서(1회) 1부

3. 설계변경 자문위원회 심의결과 1부.  끝.