문서번호	급수운영과-8948
결재일자	2020.6.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장
전동근		06/05 최춘근
협조

공사현장 실정보고서 검토 보고

(경기고사거리~봉은사역사거리간 외 1개소 송·배수관정비공사)

2020.  5.

강남수도사업소

(급수운영과)

공사현장 실정보고서 검토 보고

****************************************

“*************************************” 관련하여 감독처 서울시설공단으로부터 공사실정 보고서가 제출되어 검토하고 보고 드림.

※ 관련근거: 서울시설공단 공사감독2처-7526호(2020.5.28.)

1		공사현황

************************************************

****************************************

*************************************

********************************

********************************

***********************************

2		보고내용

1. 물가변동으로 인한 계약금액 조정

가. 계약현황 및 계약금액 조정신청 내용

*****	************	****	********
******	***********	*****	*****
*****	***********	****** ****	***********
*****	************

나. 물가변동(E/S) 검토사항

1) 조정기준 검토

► 계약금액 조정방법 : 품목조정률(계약서에 명시)

► 조정기준일 검토

구 분	내 용
****	**
***********	***********
***********	***********
****	****
*****	*****

※ 계약일 이후 90일이 경과하고 기준시점(입찰일 또는 직전조정일)대비 지수조정률이 3% 이상 상승하였으므로 관련법에 따라 물가변동으로 인한 계약금액 조정 적용기준 충족.

2) 물가변동 적용대가 검토

► 적용 공정률 검토 : 높은 쪽을 반영하여 적용 제외금액 산정

****************************************

*************************************************

*******************************

*********************************

**************************************

► 기타 제외금액 검토: 선급금 및 미확정금액 산정

⦁ 선급금공제: 없음(미반영)

⦁ 미확정금액: 없음(조정기준일)

*******************************************

************************************************

3) 조정내용 … 1회 조정(2019. 5. 8 ~ 2020. 1. 1)

구 분	적용금액(원)	비 고
**************************	*************	********
**************************	*************	******
*********************	*************	***** *************
********************	*****
*************************	**********	******** *************
********************	*	***
***********************	**********	********* *************

4) 비목군별 품목 적용 적정성 검토

► 노무비 산정 검토

⦁ 대한건설협회에서 조사 공표한 직종별 노임의 평균치를 적용 ⇒ 적정

► 기계경비 산정 검토

⦁ 한국건설기술연구원에서 발표한 표준품셈상의 건설기계 손료 합계액

산술 평균가격을 적용 ⇒ 적정

► 재료비 산정 검토

⦁ 한국은행에서 발표한 생산자 물가지수 중 해당 기본 분류지수 적용 ⇒ 적정

► 제경비 산정 검토

⦁ 기준시점 및 비교시점 제비율 검토 ⇒ 적정

다. 서울시설공단 검토 의견

『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조, 동법 시행령

제73조,동법 시행규칙 제72조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장

공사계약일반조건 제7절 3』과 관련하여 상기 물가변동으로 인한 계약금액

조정내용을 검토한 결과, 적정한 것으로 판단됨.

3		공사비 검토

항 목	공사비 변경		증,감	비고
	당초	변경
********* *********	*	**********	************	*****
****	*************	*************	************	*

※ 상기금액은 공사설계변경(정산) 전 계약금액 조정에대한 내용으로 설계변경후

물가변동으로 인한 계약금액 조정액은 재산출 예정

4		사업소 검토의견

□ *******************************************************************

붙 임: ********. 끝.