투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(별내선 1공구 가설방음벽, EGI휀스 변경설치 실정보고 승인 알림)

1.업무지시현장 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 쌍용건설(주), 별내선(8호선연장)

1공구 건설공사 주식회사 동해종합기술공사

2.작 성 일 자 : 2020-06-05 09:06:29

3.지 시 내 용

가. 별내 감1-20-222호(2020.5.22.)와 관련입니다.

나. 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사와 관련하여 가설방음벽 및 EGI휀스 변경 설치 실정보고는 책임건설사업관리단의 검토 내용이 적정한 것으로 판단되어 승인하오니,   설계변경 자문 소위원회의 자문결과를 반영하여 설계 및 계약 변경을 추진하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관							박중모			동북선1과장					김용선					도시철도사업부장					06/08 최병훈
협조자				주무관						박노성
시행			도시철도사업부-5875									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 9층															/			WWW.seoul.go.kr
전화		772-7151						/전송			772-7305					/	p05480548@seoul.go.kr												/	대시민공개