문서번호	시설보수과-4637
결재일자	2020.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		代윤동원	06/08 박문희
협조

우기대비 도로시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 6.

우기대비 도로시설물 안전점검 결과보고

우리사업소 관리 일반시도 상의 도로시설물에 대하여 외부전문가(시설안전자문단)와 합동으로 2020년 우기대비 안전점검을 시행하고, 적출사항에 대한 조치결과(계획)를 보고드림

관련근거

2020년 우기대비 도로시설물 점검 계획 (도로시설과-5780호, ‘20.5.15)

2020년 우기대비 도로시설물 점검 시행 (도로시설과-5781호, ‘20.5.15)

2020년 우기대비 도로시설물 점검 시행 (시설보수과-4118호, ‘20.5.18)

점검개요

추진기간 : 2020. 5. 18 (월) ~ 6. 5 (금) - 3주간

점 검 자

- 외부전문가(시설안전자문단) 20인

- 유지관리 업무담당 5인

- 3개조 편성 합동점검(1개조 : 외부전문가 1인, 시설물담당 2인)

대상 시설물 (시설보수과 65개 시설물)

구 분	계	일 반 교 량	고 가 차 도	입 체 교차로	터 널	지 하 차 도	복 개 구조물	비 고
계	65	22	6	6	5	22	4
1 종	7	-	-	-	4	2	1
2 종	22	7	3	2	1	9	-
3 종	17	1	1	1	-	11	3
법 외	19	14	2	3	-	-	-

점검결과

지적사항 총 64건(관리시설물 65개 중 49개 시설물에서 64건 적출)

합계	시설물 손상	포장 파손	배수 불량	부속시설 파손	안전사고 우려	청소 등
64건	4	6	20	30	0	4

※ 구조물의 안전에 영향을 주는 긴급사항은 적출되지 않았음

조치계획(결과)

즉시조치 : 2020.6월말 까지 조치 예정

- 소파, 배수구 청소 등 경미한 사항 ⇒ 직영반 보수

- 타 기관 소관사항 ⇒ 해당기관 이첨(공문 통보)

중•장기 조치

- 정밀시공 및 공사물량이 많은 교면 재포장, 콘크리트 균열·단면보수 등

⇒ 2020년 단위공사 및 일상유지보수공사에 포함하여 가능한 상반기 조치

- 지속관찰로 지적된 사항

⇒ 정기점검 및 정밀점검시 지속적으로 상태변화를 확인하고, 진행성 결함으로 판단시 보수계획 수립

행정사항

점검결과 지적사항에 대하여는 도로시설물 관리담당자 별도 조치계획에 따라 조치하고, 조치후 사진 등 그 결과를 기록관리

※ 단위공사 및 일상유지보수공사는 조치계획을 반드시 확인․반영

외부전문가(시설안전자문단) 점검비 지급

- 점검수당 : 200,000원/회 × 19일 = 3,800,000원

- 예산과목 : (도시개발특별회계, 도로시설과) 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영, 사무관리비

2020년 우기대비 안전점검 외부전문가 참여현황

이름	소속	직위	점검 시설물	점검시설수 (점검일)
이두원	SQ엔지니어링	부사장	목동교, 목동교서측지하차도, 화곡고가, 선유교	4개소 (5.27)
강병윤	수성엔지니어링	부사장	작동터널, 국회앞지하차도, 노들길지하차도, 여의2교, 여의하류2교	5개소 (5.29)
유제남	㈜유신	부사장	시흥IC, 신월IC, 등촌지하차도, 광복교, 가족길교	5개소 (5.28)
성경익	(재)한국건설안전기술원	원장	생태터널, 개화천복개, 개화램프B교	3개소 (5.19)
박정용	SQ엔지니어링(주)	이사	궁동터널, 광명교, 개화교	3개소 (6.3)
장경호	중앙대학교	교수	고척교, 오목교서측지하차도, 행주1교, 행주2교	4개소 (5.20)
장석환	대진대학교	교수	서울교, 서울교접속지하차도, 성산지하차도	3개소 (5.22)
이왕철	한국시설안전연구원	전무	개봉고가차도, 개봉교, 개봉지하차도	3개소 (5.25)
최용기	(재)대한컨설탄트	상무	도림천복개(좌안), 도림천하류복개, 도림교	3개소 (5.26)
조병준	㈜셀파코퍼레이션	사장	개봉철도고가, 오류IC, 개화IC	3개소 (6.4)
김권일	㈜다인안전	사장	오금교, 오금교접속지하차도, 구로역지하차도	3개소 (6.2)
정인근	㈜케이씨티이엔씨	대표	가리봉철도고가, 공단IC	2개소 (5.21)
이정원	㈜삼림엔지니어링	부사장	오목교, 오목교동측지하보차도, 신도림지하차도	3개소 (5.22)
김병일	다음기술단	이사	서부트럭터미널앞지하차도, 고척2지하차도, 구로1교	3개소 (5.27)
김삼영	세종종합기술공사	상무	오류철도고가, 가마산고가, 가마산지하보차도	3개소 (5.28)
박훈규	㈜벽산엔지니어링	이사	외발산지하차도, 화곡터널, 공항입구지하차도, 개화지하차도	4개소 (6.1)
이광호	인성산업(주)	CTO	여의2지하차도, 영등포R-IC, 여의하류지하차도	3개소 (6.4)
양승이	한국품질연구원	대표	오금지하차도, 신정교접속교, 오목지하차도, 염창IC하부복개,	4개소 (5.29)
최상식	다음기술단	사장	범박터널, 역곡천교, 행주IC교, 구로지하차도	4개소 (5.10)

붙임  1. 우기대비 도로시설물 안전점검 결과 1부.

2. 우기 점검보고서(외부전문가 합동, 사진 포함) 1부.  끝.