문서번호	건축부-9693
결재일자	2020.6.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
김완선		신추교	06/09 임인구
협조

『남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)』

건강가정지원센터 설계변경(신규비목) 단가협의 보고

2020. 6.

도시기반시설본부

(건   축   부)

『남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)』

건강가정지원센터 설계변경(신규비목) 단가협의 보고

『남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)』으로 추가 발생한 건강가정지원센터 옥외데크공사의 공사비 산출(설계변경)과 관련하여, 공사계약일반조건 제20조에 따라 단가 협의율 조정회의를 실시하고 다음과 같이 추진코자 보고 함.

1		조정회의 대상 공사개요

○ 공 사 명 : 남산예장자락 건강가정지원센터 옥외데크공사

○ 위    치 : 중구 예장동 소파로 4-6(소파로 4길 6)

○ 규    모 : 2층 출입문 및 옥외데크 설치(신설), 옥상 파고라 및 난간 설치

○ 공사금액 : ************

○ 시 공 자 : KBI산업개발㈜ 외 3개사

○ 감 리 자 : ㈜동성엔지니어링건축사사무소 외 2개사

※ 남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)

〇 위    치 : 중구 예장동 4-1번지 일대

〇 규    모 : 지하1층/지상1층, 연면적 16,992㎡, 신축

〇 공사기간 : ****************************************************

〇 공사금액 : *********

〇 시 공 자 : KBI산업개발㈜ 외 3개사

〇 감 리 자 : ㈜동성엔지니어링건축사사무소 외 2개사

2		관 련 근 거

○ 공사계약일반조건 제20조 제2항(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 발주기관이 설계변경을 요구한 경우(계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 경우를 포함한다. 이하 같다)에는 제1항의 규정에 불구하고 증가된 물량이나 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 발주기관과 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의(이하 “협의”라 한다)하여 결정한다. 다만, 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.

3		협의율 조정 회의(1차)

*******************************************

**********************************************************************

***********************************************************

4		협의율 조정 회의(2차)

○ 일    시 : *************************

○ 장    소 : ***************

○ 참 석 자 : ******************************  ***********

○ 협의내용

구 분	적용 협의율	제시근거
발주처 및 건설사업관리단	***** *******	******************************************************* *********************************************************************************************************************************** **********************************
시공사	***** ****	********************************************************** ***********************************************************

○ 협의 조정결과 --- ***********************

***********************************************************************************************************************************

******************************************************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************************************

**********************************************************

5		조 치 계 획

****************************************************************

**************************************************************

붙 임 : 건강가정지원센터 설계변경 협의단가 검토보고 1부.  끝