문서번호	토목부-11200
결재일자	2020.6.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
윤효진		최진우	06/09 김용제
협조
	주무관		이상근

스마트송장 운영비 변경 검토 보고

(신림공영차고지(저류조 포함)건설공사)

2020. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

스마트송장 운영비 변경 검토 보고

(신림공영차고지(저류조 포함) 건설공사)

스마트송장 관리시스템 운영비 개선 방침에 따라 반출 예정인 사토물량에 대한 스마트송장 단가를 변경코자 검토 보고드림

Ⅰ		관 련 근 거

○ 신림차고지(감) 제2020-125호('20.6.2) : 스마트 송장 단가 변경 실정보고

○ 토목부-24326('19.12.26.) : 스마트송장 관리시스템 운영비 개선 검토보고

Ⅱ		공 사 개 요

○ 위    치 : 관악구 신림동 140-2번지 일대

○ 규    모 : 공영주차장 및 빗물저류조 조성

- 주 차 장 : 버스 101대(지상1층, 지하1층), 관리동 및 부속시설

- 저 류 조 : 빗물저류조 1개소(V=35,000㎥, 지하 2층)

○ 사업기간 : 2018.10. ~ 2021.09.

○ 도 급 비 : 22,918백만원

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 스마트송장 관리시스템 운영비 개선 방침(토목부-24326호, '19.12.26.)에 의거 반출예정인 사토 물량에 대해 스마트송장 단가를 변경코자 함.

○ 공사비 증감 현황

(단위 : 천원)

구분	규격	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
스마트송장	운반비의 1.5%	12,280	3,756	감 8,524
	330원/㎥	-	10,404	증 10,404
총공사비		12,280	14,160	증 1,880

Ⅳ		조 치 의 견

○ 스마트송장 단가 변경 건에 대하여 검토한 결과 책임건설사업관리기술인의 검토의견은 적정하므로 설계변경에 반영코자 함.

붙임 1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 설계 내역서 1부.

3. 관련 방침서 1부.  끝.