“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	영등포정수센터 보충공급 관련 추진일정 송부 및 협조 요청

1. 본부장 방침(배수과-4183호(2020.4.24.)) 및 배수과-5276호(2020.6.03.)와 관련입니다.

2. 생산량이 증가하고 있는 영등포정수센터의 안정적 수돗물 생산을 위한 보충공급(강북 ⇒ 영등포정수지) 방안에 대해 아래와 같이 시행하고자 하오니 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 영등포정수센터 보충 공급방안 관련 추진일정

○ 추진순서 : 공급관로 구간별 관세척 후 수질 확보 될 시 다음 구간 관세척 시행

① 증산배수지 ~ 성산대교 북단 : 서부수도(D1350, L=2.5km)

② 성산대교 북단 ~ 남단 : 서부, 남부수도(D700×2열, L=1.97km)

③ 성산대교 남단 ~ 영등포 정수지 : 남부수도(D1200, L=0.6km)

○ 추진일정 : 6월말까지 관세척 완료하여 보충공급 시행

① 증산배수지 ~ 성산대교 북단 관세척(서부수도, 배수과)	6.09. ~ 6.12.

② 성산대교 북단 ~ 남단 관세척(서부․남부수도, 배수과)	6.15. ~ 6.19.

③ 성산대교 남단 ~ 영등포 정수지(남부수도, 배수과, 영등포정수센터)	6.19. ~ 완료시

○ 관세척 완료 후 보충공급 시 기존 서부수도 급수수계(백련, 증산배수지) 급수 이상유무 확인 후 강북 ⇒ 영등포 보충공급(약 3만톤/일) 시행

□ 관련부서별 협조사항 : 붙임문서 참조

□ 당부사항

○ 서부수도사업소 : 6.9.(화)부터 증산배수지(불광천) ~ 성산대교 북단 관세척 시행

○ 남부수도사업소 ┏ 단계별로 관세척 시행시 적극 협조(일정 별도 협의)

┗ 영등포 정수센터내 강북 보충관로(D1200)에서 목동배수지 송수관로 연결배관의 제수밸브 위치 확인하여 밸브실 설치

○ 영등포정수센터 ┏ 관세척 시 보충공급을 위한 사전 점검 및 검토사항 병행

┗ 2안) 강북 ⇒ 목동배수지 공급을 위한 제수밸브 등 설치계획 수립 하여 급수부로 예산 요청(7월중)

※ 자세한 협조사항은 붙임문서 참조하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 영등포 보충공급 관련 추진일정 및 협조사항 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,수질과장,기전설비과장,계획설계과장,누수방지과장,서부수도사업소장(급수운영과장),서부수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(시설관리과장),영등포아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
★주무관	김지환		배수과장	김원수		급수부장	06/09 이규상
협조자	주무관	조성균		주무관	김창옥
시행	배수과-5445	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개