투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제 목	교통안전시설 심의 결과 및 설계 지시(2020년 1차)에 따른 설계도서 납품 알림

1. 관련근거

가. 교통운영과-1941호(2020.2.4.)

- 교통안전시설 심의 결과 및 설계 지시(2020년 1차)

나. ㈜태영알앤디 문서번호 태영(강남) 2020-024호(2020.06.09.)

- 2020년 교통신호기 신설 및 보수공사 규제설계지시(1차) 실시설계제출

2. 위 호와 관련하여 우리사업소로 납품된 설계도서의 납품일을 알려드리오니 아래 내용을 참조하여 귀 부서에서 판단하여 처리하시기 바랍니다.

가. 설계지시 : 2020년 2월 4일

나. 설계도서 납품 : 2020년 6월 9일

다. 납품지연 판단 및 처리

- 관련근거 : 과업내용서 2.2.5 성과품 작성 및 납품(6. 설계도서 제출기한)

- 3억이상 6억이하 제출기한 30일.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	공혜성		주무관	호정오		기전과장	전결 06/10 代김흥식
협조자
시행	기전과-5306	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동 67-1)	/
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개