문서번호	토목부-11367
결재일자	2020.6.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김재건		代이한규	06/10 김용제
협 조

방호벽 콘크리트 절단방법 변경 검토보고

(고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치공사)

2020.6.

서울시 도시기반시설본부

( 토 목 부 )

방호벽 콘크리트 절단방법 변경 검토보고

고덕교 통신관로 이설 지연에 따라 방호벽 콘크리트 절단방법을 변경하여 공기지연 방지 및 안전성 증대를 통해 공사추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

○ 실정보고(방호벽 콘크리트 절단 시공방법 변경)-창덕궁감 2020-151호(′20.6.9.)

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치공사

○ 공사위치 : 강동구 강일동 599일원

○ 공사규모 : 교량확장 1개소(4차로→6차로), 보도교 설치(교량 양측 각 B=2.5m)

○ 공사기간 :′19.01.18. ~ ′20.12.31.

○ 총공사비 : 3,149백만원

○ 시공사/감리단 : 임원개발(주)외 1개사/(주)경동엔지니어링외 1개사

Ⅲ		현황 및 문제점

○ 설계상 다이아몬드 와이어 쏘(D.W.S) 공법 산정물량이 적게 반영되어 있고 (내역서 적용 30㎡, 실제 66.5㎡)

○ 기존 고덕교 보도하부 통신관로 이설 지연(6월말 완료 예정)으로 방호벽 콘크리트 해체를 위해 당초 설계상의 D.W.S 공법 사용시 공기가 지연될 우려가 있으며

○ D.W.S 공법으로 횡단면 절단시 기존 방호벽의 철근 활용이 불가

⇒ 공기지연 방지 및 기존 철근 활용하여 안전성을 증대할 수 있는 타공법 검토 필요

Ⅳ		검 토

□ 절단공법 변경(안) 비교검토

구 분	당초(D.W.S 공법)	변경(Wheel Saw 공법)
단면도
사용 장비
작업 방법	- 작업구 천공후 금속제 비드를 장착한 와이어를 이용한 절단작업 시행 - 가이드레일을 설치하여 절단물의 방향 조정 (현장 횡방향 절단 필요)	- 별도의 고정장치나 레일이 필요없이 500mm 이하 절단작업 시행 (현장 수직방향 절단 가능)
고덕교 현장 적용성	- 절단전 보도부 통신관로 이설 요구됨 (공기지연 초래)	보도부 통신관로 이설 전 작업 가능 (공기지연 해소 효과)
	- 횡방향 절단에 따라 넓은 작업공간이 필요하며 기존 방호벽 철근을 절단하므로 활용 불가 (작업 중 도로 주행차량 관리 필요)	수직방향 절단이므로 좁은 작업공간에도 시공 가능하며 기존 방호벽의 철근 일부를 활용 가능 (안전성 증대 효과)
	- 작업공정이 복잡함 (천공 → 레일설치 → 절단)	- 작업공정이 단순함 (별도 준비 작업 불 필요)
	- 작업 용수(슬러지) 고덕교 유입에 따른 관리 상대적 어려움	- 작업 용수(슬러지) 고덕교 유입에 따른 관리 상대적 용이
	- 작업중 소음 적음	- 작업중 소음 상대적 많음
단가	251,916원/㎡ (협의율 적용)	82,450원/m (시공사 제안으로 낙찰률 적용)
검토 결과	D.W.S 공법에서 Wheel Saw 공법으로 변경시 작업 효율성, 안전성이 증대하며 공기지연 방지 효과도 있는 것으로 판단됨

□ 공사비 증·감 검토

○ 당초 설계물량이 적게 반영되어 있어 실제 증가된 물량으로 공사비 산정

- D.W.S : 30㎡ → 66.5㎡

- Wheel Saw : 186.2m

(단위 : 천원)

구 분				당 초	변 경		비 고
					검토1안 (D.W.S) 수량증가	검토2안 (Wheel Saw)
총 공 사 비				12,650	26,840	21,120
도급비	공급가액	직공비	토공	8,062	17,257	15,352
			소 계	8,062	17,257	15,352
		간접공사비		3,438	7,143	4,450
		계		11,500	24,400	19,800
	부가가치세			1,150	2,440	1,980
	합 계			12,650	26,840	21,780	검토1 > 검토2 5,060천원
				-	(증)14,190	(증)9,130

- D.W.S 공법 → Wheel Saw 공법으로 변경시 공사비 5,060천원 절약 가능

- 총공사비 (증)9,130천원

Ⅳ		감리단 검토의견

○ 구조물 확장을 위한 깨기 작업시 신·구 콘크리트 일체화 강구(구조물 안전성 증대) 및 공사 추진의 연속성을 고려하며 약 5,000천원의 공사비 절감효과가 있는 Wheel Saw 절단공법 으로 작업방법 변경하여 시공함이 타당함.

○ 신규 단가는 계약 당사자의 요청에 의한 사항이므로 낙찰률 86.775%를 적용

Ⅴ		조치의견

○ 방호벽 콘크리트 절단 시공방법 변경에 대하여 감리단 검토의견과 같이 승인하고, 추후 설계변경시 반영 하고자 함.

붙 임 : 1) 감리단 검토의견서 1부.

2) 시공사 실정보고 1부.  끝.