“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰(우면산가압장 급수체계 개선공사)

1. 우리 본부에서 시행중인 “우면산가압장 급수체계 개선공사”에 대하여 계약심사를     마치고 아래와 같이 설계변경(총차분 5회, 4차분 3회)을 계약의뢰 합니다.

가. 공사현황

1) 공 사 명 : 우면산가압장 급수체계 개선공사

2) 공사개요 : 양재아리수올림터 설치 Q=209천㎥/일, 송수펌프 : 7대,

송배수관 D1,200~1,500㎜ L=535m

3) 공사기간

- 총차분 : 2017. 12. 13.~2020. 9. 15.

- 4차분 : 2020. 1. 1.~2020. 9. 15.

*******

*****************************************************

**************************************************

******************************************************

5) 계 약 자 : 국정종합건설㈜ 외 1개사

나. 설계변경 현황 및 사유

1) 설계변경 금액

․ 총차분(5회 설계변경)

(단위 : 원)

****	****	****	***********	***
*****	*************	*************	****************
*****	*************	*************	***************
****	*************	*************	****************

․ 4차분(3회 설계변경)

(단위 : 원)

****	****	****	***********	***
*****	*************	*************	****************
*****	**********	***********	***************
****	*************	*************	****************

2) 계약기간 : 변경없음

3) 변경사유

- 물가변동 조정

- 우면산가압장 조절2지 부단수차단 밸브설치 등 신공종 발생 및 물량 증감

- 관급자재 낙찰차액 발생 및 신규자재 구매

붙임 :  1. 설계변경 품의 1부.

2. 계약심사결과 공무(본청 계약심사과) 1부.

3. 설계변경 도서제출 공문(건설사업관리단) 1부.

4. 설계변경 내역서(총차분 5회) 1부.

5. 설계변경 내역서(4차분 3회) 1부.

6. 계약금액 조정 검증 확인서 1부.

7. 설계변경 합의서 1부.

	시설과장
주무관	김형식		시설과장	06/10 代강정구
협조자	주무관	박건수		시설팀장	최이영
시행	시설과-2692	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1491	/전송	02-3146-1429	/	see1997@seoul.go.kr	/	부분공개(5)