코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사계획변경 통보 및 우기대비 공사장 관리 철저(한양도성 유적전시관)

1. 귀사의 발전과 무사고를 기원드립니다.

2. 남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사의 포장공사와 관련하여 조경설계자 및 상주감리원과 협의(2020.6.4.)한 결과 석재포장의 유지관리 및 하자예방을 위해 아래와 같이 알려드리니 공사에 반영하시기 바라며, 우리시에서는 야외 유적전시관의 임시개장을 준비하고 있으므로 시공자는 포장공사를 2020.7.10.까지 완료하시고 해당 공사전 실정보고를 제출해 주시기 바랍니다.

《공사계획 변경시공 내용》

당 초	변 경	비 고
화강석판석포장 판석 두께 50mm	화강석판석포장 판석 두께 100mm	유지관리 및 하자예방에 유리 붙임 포장계획도 및 상세도 참조

3. 아울러, 우기철을 대비하여 공사장의 피해발생, 토사유출, 수목 쓰러짐 및 침식 등이 발생하지 않도록 공사장 관리와 공정관리에 철저를 다해 주시기 바라며, 2020.6.8. 남산 공원매점의 이전이 완료되었으므로 전시·관리실의 착공을 하시기 바랍니다.

붙임: 포장계획도 및 상세도 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)금성종합건축사사무소 대표 이석범님(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사 감리자 - 감리원 이멜 발송),원택건설(주) 대표 오원진님(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사 대표시공자 -현장관리원 이멜 발송)
주무관	왕승찬		도성관리팀장	정일선		한양도성도감과장	06/10 안중호
협조자
시행	한양도성도감-6071	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	대시민공개