문서번호	기술심사담당관-10501
결재일자	2020.6.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술지원팀장	기술심사담당관
이광백		조임남	06/10 권완택
협 조
	건축심사팀장			도태환
	설비심사팀장			안계훈

속초공무원수련원 증축 및 리모델링공사 설계용역 설계경제성 검토(VE) 실행계획

2020. 06.

기술심사담당관

속초공무원수련원 증축 및 리모델링공사 설계용역

설계경제성 검토(VE) 실행계획

「속초공무원수련원 증축 및 리모델링공사 설계용역」에 대해 설계VE소위원회를 구성하고, 설계경제성 검토(VE)를 추진하고자 함.

1		추진 근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ ‘20년 설계경제성 검토 운영계획(행정부시장 방침 제17호, ’20.01.29.)

□ 설계경제성 심사 의뢰(도시기반시설본부 건축부-9303, '20.6.3.)

2		요청사업 개요

**************************************************

**************************************************

************************

***************************************

*************************************

******************************************

*******************************

****************

3		운영협의회 검토사항

□ 운영협의회 구성

○ 위원장 : 기술심사담당관

○ 간  사 : 기술지원팀장

○ 위  원 : 건축심사팀장, 설비심사팀장

□ 운영협의회 검토회의

○ 회의일시 : 2020.6.10.(수) 10:30

○ 검토내용

- 속초공무원수련원 증축 및 리모델링공사로서「서울특별시 설계경제성(VE) 검토 운영지침(2020.01.23.)에 의해 설계경제성(VE) 검토대상(총공사비 100억원이상)이므로 검토함이 타당함

□ 운영협의회 검토결과 : 기술심사담당관 대행검토 시행

4		설계 경제성검토 계획

□ 주요 검토내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 추진 방법 : 설계경제성검토 소위원회를 구성하여 검토

○ 설계경제성검토소위원회, 발주부서, 설계사 등 20명 내외 참여

□ 검토위원회 구성

구 분	구 성 원	역 할
총 괄	▸위원장 권완택 기술심사담당관 ▸간 사 도태환 건축심사팀장 ▸설계VE 담당 이광백 주무관, 오광원주무관	․ 설계VE 계획, 회의 지원 등
리 더	▸안장원 Hnc건설연구소	․ 워크숍 준비, 진행 ․ 결과보고서 작성
진행보조요원	▸이승학 Hnc건설연구소	․ 워크숍 준비, 보조 ․ 결과보고서 작성보조
외부 검토위원 (5개 분야)	▸(건축계획) 빈혜진 위원 다음스페이스 ▸(건축구조) 정소영 위원 삼림엔지니어링 ▸(건축시공) 김영상 위원 ㈜영화키스톤건축사사무소 ▸(토질기초) 유종문 위원 ㈜제일엔지니어링종합건축 ▸(전기전력) 천영범 위원 서울주택도시공사 ▸(기계소방) 권병호 위원 ㈜동해종합기술공사	․ 기능 분석 ․ 기술 검토 ․ 아이디어 제안 ․ 아이디어 평가 ․ 제안서 작성
발주부서	▸유현수 사무관 도시기반시설본부 건축부	․ 사업설명, 제안서 검토
설계자	▸조남호 대표 ㈜솔토지빈건축사사무소	․ 사업설명회 준비 ․ 제안서 원가분석 등

□ 설계VE 검토 세부일정

일 시	내 용
’20. 06. 23.(화) 10:00~17:00	- 사업설명 및 질의응답, 성능평가, 기능분석 ‣ 장소 : 기술심사담당관 회의실
’20. 06. 25.(목) 10:00~17:00	- 검토회의 : 성능평가, 아이디어 창출 및 개략평가 ‣ 장소 : 기술심사담당관 회의실
’20. 07. 06.(월) 10:00~17:00	- 검토회의 : 구체화검토 및 발표, 아이디어 평가, 대안선정 ‣ 장소 : 기술심사담당관 회의실
’20. 07. 08.(수)	- VE 제안서 통보(채택여부 요청) (기술심사담당관 ⇒ 도시기반시설본부 건축부)
’20. 07. 15.(수)	- VE 제안 채택결과 회신 (도시기반시설본부 건축부 ⇒ 기술심사담당관)
’20. 07. 22.(수)	- 설계경제성 심사(VE) 결과 통보 (기술심사담당관 ⇒ 도시기반시설본부 건축부)

※상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있음

4		소요 예산

********************************

*********************

********************************************

**************************************************

**********************************************

***********************************************************

**********************

□ 지급부서

○ 위원  수당 : 신청부서(도시기반시설본부 건축부)

○ 회의운영비 : 기술심사담당관

5		향후 계획

□ 설계경제성 검토결과서 통보----------- ’20. 07. 22.

붙   임 : 1. 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2. 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.