문서번호	전환도시담당관-5272
결재일자	2020.6.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	전환도시사업팀장	전환도시담당관
지은영	성수미	06/10 최현정

「도봉 도시전환 제작 실험실」설계용역 변경 계획

2020. 6.

전환도시담당관

「도봉 도시전환 제작 실험실」설계용역 변경 계획

「도봉 도시전환 제작 실험실」의 상징성을 가진 건축물로 설계하기 위하여 용역기간을 연장하고 사업 추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

○「도봉 도시전환 제작 실험실」조성·운영계획(전환도시담당관-2036, ’20.2.27.)

○ 「도봉 도시전환 제작 실험실」설계용역 추진계획(전환도시담당관-2546, ’20.3.11.)

Ⅱ		추진경위

○  ’20. 3. 17.  설계용역 계약체결

○  ’20. 3. 25.  설계용역 착수

○  ’20. 4.  9.   설계 자문회의(1차)

******************************************

*****************************************

○  ’20. 5.  7.   기획 자문회의

*********************************************

***********************************************

○  ’20. 5. 13.  설계 자문회의(2차)

*****************************************************************

Ⅲ		변경계획

□ 용역개요

○  용 역 명:「도봉 도시전환 제작 실험실」신축 공사 설계용역

************************************

*************************

*****************

□ 변경사항

********

**************************

**************************

*****

*********************************************************************************************

Ⅳ		향후일정

○  변경계약 의뢰(재무과)                         :  2020. 6.

○  설계용역 준공                                  :  2020. 7.

○  공사 추진                                      :  2020. 8.~11.

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.