문서번호	캠퍼스타운활성화과-5440
결재일자	2020.6.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		종합사업팀장	캠퍼스타운활성화과장
정희수		장양규	06/11 이승복
협 조
	교육훈련팀장			김승현
	주무관			박영동

- 2020년 캠퍼스타운 동북권 사업 -

5월 성과회의 개최결과 보고

2020. 6

경 제 정 책 실

(캠퍼스타운활성화과)

- 2020년 캠퍼스타운 동북권 사업 -

5월 성과회의 개최결과 보고

캠퍼스타운 동북권 사업의 성공적인 추진을 위하여 5월 성과회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일시 및 장소

일시		’20. 5. 19.(화) 10:00	’20. 5. 20.(수) 14:00	’20. 5. 27.(수) 15:00
장소		고려대학교	광운대학교	서울시립대학교
참가	자치구	강북구, 성북구	노원구, 도봉구	광진구, 동대문구, 중랑구
	대학	고려대, 동덕여대, 서경대, 성신여대, 한성대, 한신대	광운대, 인덕대, 덕성여대 삼육대‧서울과기대‧서울여대	경희대, 서울시립대, 서일대, 세종대, 한국외국어대,

○ 참   석   자 : 77명

- 서울시 : 캠퍼스타운활성화과장, 종합사업팀장, 담당자

- 대  학 : 캠퍼스타운지원센터장, 담당자

- 자치구 : 소관부서 팀장, 담당자

○ 회 의 내 용

- 대학별 사업 추진내용 공유 및 현안사항 논의 등

□ 주요내용

○ 대학별 공정보고

(1) 강북‧성북구 6개 사업

대 학	추진실적	추진계획
고 려 대	① 혁신거점(SH 부지) : 구조진단 및 리모델링 설계 완료 ② 성장기업 전용공간(의료원 부지) : 임대조건 및 운영관리 주체 관련 의사 타진 ③ 어울림센터(민간부지) : 층별 용도 계획 협의 ④ 창업경진대회 : 운영계획 수립 및 연장지원평가 서류접수 진행 ⑤ 창업문화 특화가로 조성 : 스마트폴 세부 스펙 및 향후 일정 협의	① 혁신거점(SH 부지) : 공사업체 선정 및 공사 착공 ② 성장기업 전용공간(의료원 부지) : 임대조건 및 운영관리 주체 관련 협의 진행 ③ 어울림센터(민간부지) : 의견수렴을 통한 층별 용도 결정 ④ 창업경진대회 : 경진대회 공고 및 홍보 추진 입주팀 연장지원평가 심사 실시 ⑤ 창업문화 특화가로 조성 : 디자인 심의 등 행정절차 추진
동덕여대	① 동덕 아트컬쳐 공유스튜디오 : 대관 관련 규정 제정 및 기자재 구비 ② 창업인큐베이터센터 및 교육실 : 구조안전 검사 완료 ③ DAC 창업 아이디어 경진대회 : 청년창업팀 13개팀 선발(196팀 참여)	① 동덕 아트컬쳐 공유스튜디오 : 공유스튜디오 개방 및 기자재 대여 ② 창업인큐베이터센터 및 교육실 : 공사 입찰 진행 및 시공사 선정 8월 말 완공 예정 ③ DAC 창업 아이디어 경진대회 : 13개팀 창업활동 지원(4~12월)
서 경 대	① 창업카페 : 공간활용 관련 협의 및 계획/설계 ② 문화예술 예비창업팀 모집 : 20팀 최종 선발(총 35팀 지원) ③ 문화예술 공동체 사업 : ”힘내라!성북” 프로젝트 진행(5.11~6.30)	① 창업카페 : 인테리어 시공 ② 문화예술 예비창업팀 모집 : 필요분야 수요조사 후 담임멘토 매칭 ③ 문화예술 공동체 사업 : 마을-대학지역상생프로그램 진행/운영
성신여대	① 수유시장 거점공간 : 상설전시 진행, (사)한국예총 온라인 쇼핑몰 “아트샵”과 업무협약 진행 ② 군집창업 아트창업빌리지 프로그램 : 2020년 조형아트서울 참가 홍보 진행 ③ 지역상생 프로그램 : 참여 신청서 접수(~5.29)	① 수유시장 거점공간 : 전시장 인테리어 개선 ② 군집창업 아트창업빌리지 프로그램 : 2020년 조형아트서울 참가(6.17~21) : 6월 19일까지 신규팀 모집(40팀) ③ 지역상생 프로그램 : 참여팀 선발(6.12, 24팀 선발예정)
한 성 대	① 상상밸리Ⅰ : 창업공간 보안공사 및 입주관련 절차 진행 ② 상상밸리Ⅱ : 한성대 소유 외부기숙사 1개동 협의 중 ③ 청년창업팀 공모전 : 10개팀(최대 16개팀) 선발 예정	① 상상밸리Ⅰ : 창업기업 입주 ② 상상밸리Ⅱ : 리모델링 설계, 하반기 착공 예정 ③ 청년창업팀 공모전 : 6월 2주 창업기업 입주 예정
한 신 대	① 창업육성 프로그램 : 창업토크콘서트 진행(5월 중순, 4회차) ② 지역상생 프로그램 : 창업팀엑스포 준비를 위한 기획회의 진행 ※ 코로나로 인한 현장탐방 불가	① 창업육성 프로그램 : 기획창업공간 확정 및 창업팀 모집(2~3팀) ② 지역상생 프로그램 : 기획운영회의 진행 및 세부계획서 작성 ※ 코로나로 인한 현장탐방 불가

(2) 노원‧도봉구 4개 사업

대 학	추진실적	추진계획
광 운 대	① 클리닉센터1 : 창업경진대회 수상팀 중 입주희망 4팀 확정 ② SNK-VITAMIN센터, SNK-스타트업스테이션 : 창업팀 총 15팀 선발(각 10팀/5팀) ③ 지역연계수업 : 3개 과목 온라인 강의 진행 중 ④ 광운로 대학문화가로 조성 : 기본 및 실시설계 제안서 평가	① 클리닉센터1 : 입주팀 추가 모집 예정(6팀) ② SNK-VITAMIN센터, SNK-스타트업스테이션 : SNK-스타트업스테이션 5팀 추가 모집 ③ 지역연계수업 : 1학기 성과프렌즈 데이 개최 예정(변동 가능) ④ 광운로 대학문화가로 조성 : 업체 선정 및 계약 진행
덕성여대	① 창업거점센터 : 제안심사 입찰 진행(5월 중 완료 예정) ② 시반(창업체험) 거리 : 부지 선정 완료 및 건축 투자 확정 ③ 창업 경진 대회(입주사 선정) : 진행계획 및 홍보계획 수립	① 창업거점센터 : 공사진행(6.1~21. 3주 소요예정) ② 시반(창업체험) 거리 : 시공업체 입찰 준비 작업 진행 ③ 창업 경진 대회(입주사 선정) : 모집 공고 등록 및 서류 접수(4팀 선발 예정)
삼육대‧서울과기대‧서울여대	① 거점2센터, 에코팜 : 인테리어 공사 입찰 공모, 업체 선정 ② 창업육성/지역상생 프로그램 : 관련 회의, 장소 협의 및 참여자 모집 진행	① 거점2센터, 에코팜 : 공사 완료 및 준공검사 실시. 입주팀 모집(7팀) ② 창업육성/지역상생 프로그램 : 프로그램 운영, 결과물 제작 및 설치
인 덕 대	① 창업지원시설 조성 : 5월 중 계약자 협상 및 계약 ② 창업지원 프로그램 : 운영방안 수립 및 내부 협의 진행	① 창업지원시설 조성 : 인테리어 리모델링 공사완료 및 운영계획 수립 ② 창업지원 프로그램 : 참여자 모집 및 선발

(3) 광진‧동대문‧중랑구 5개 사업

대 학	추진실적	추진계획
경 희 대	① 홍릉 바이오‧의료 거점센터 : 설계업체 선정 및 계약. 컨셉설계 진행 ② WE+ Camp : 후보지 현장 답사 및 컨셉설계 진행 ③ WE+ 아카데미 : 창업경진대회 공모안 및 홍보 준비	① 홍릉 바이오‧의료 거점센터 : 시공입찰 준비(창업공간 26실 조성 예정) ② WE+ Camp : 조성입지 결정 및 설계 착수 ③ WE+ 아카데미 : 창업경진대회 모집(~6.29, 25팀 선발)
시 립 대	① 청년UP플랫폼 : 리모델링 1단계 완료. 2팀 선발 심사 중 ② 창업INN : 2개세대 우선조성, 6명 입주자격심사 진행 ③ 창업MAKERS : 창업팀 선발(~6.1, 총 13팀 선발)	① 청년UP플랫폼 : 리모델링 2단계 설계용역 완료(~6.11) ② 창업INN : 우선조성세대 내부환경 개선 및 입주(6.1) ③ 창업MAKERS : 창업활동지원 협약 체결 후 지원금 교부
서 일 대	① 창업메이커센터, 창업카페 : 코로나 확산 예방조치로 공유공간 출입통제 ② 상설매장운영 : 위치 시장조사(역세권으로 추진 중)	① 창업메이커센터, 창업카페 : 향후 공유공간 활용여부 결정 예정 ② 상설매장운영 : 임대 계약 및 인테리어 진행
세 종 대	① 가온누리Ⅰ‧Ⅱ : 조성완료 및 창업기업 순차 입주 진행 ② 5단계 세종 스타트업 육성 : 창업활동비 지급 및 입주기업 중간평가 진행 ③ 지역연계수업 : 1학기 5개 과목 진행 중 ④ 쉐어하우스 : 쉐어하우스1 준공 및 입주 완료	① 가온누리Ⅰ‧Ⅱ : 가온누리Ⅱ 2차 리모델링 발주 ② 5단계 세종 스타트업 육성 : 스타트업 캠프 신청서 및 사업제안서 접수 ③ 지역연계수업 : 성과 발표회 진행 예정(6월 말~7월 초) ④ 쉐어하우스 : 쉐어하우스2 발주 예정(6월)
한국외대	① 이문일공칠 창업보육공간 : 코로나19로 시설폐쇄, 방역 진행 ② 이문스프링 창업센터 : 임대시설 추가 예산 확보 및 계약 협상 진행	① 이문일공칠 창업보육공간 : 취‧창업 프로그램 진행 예정 ② 이문스프링 창업센터 : 독립출판 프로젝트 창업팀 입주(10팀)

○ 주요 논의내용

- 창업팀원 수 증가에 대비하여 공간 구획 시 가변형으로 조성하는 방안 건의

- 온라인 플랫폼을 통한 캠퍼스타운 사업간 창업팀 홍보 및 지원 요청

- 캠퍼스타운 창업자의 범위 설정에 관한 가이드라인 마련 필요

- 캠퍼스타운 창업경진대회의 경우 공식적으로 입주를 목표로 하는 ‘입주경진대회’ 임을 재안내

- 신규 캠퍼스타운 사업 성과평가 안내 및 공정관리 요청

□ 현안 및 안내사항

○ 캠퍼스타운 기술매칭사업 참여 홍보

- 신기술접수소 온라인 접수 : ’20년 4월 20일부터 접수 진행 중

○ 서울 캠퍼스타운 온라인 플랫폼 오픈 안내

- 캠퍼스타운 홈페이지, 입주공간 관리, 창업팀 홈페이지 등 자료입력 및 홍보 요청

○ 코로나19 감염예방 관련 가이드라인 준수 요청

□ 행정사항

○ ***************

*************************************

○ 예산과목

- 캠퍼스타운활성화, 캠퍼스타운조성, 세종대 캠퍼스타운(종합형) 추진, 일반운영비, 사무관리비

○ 학습시간 인정(3시간)

- 대   상 : 시‧구 관계자 중 회의 참석자

□ 회의사진

성북‧강북 성과회의(5.19)	노원‧도봉 성과회의(5.21)	광진‧동대문‧중랑 성과회의(5.27)

붙임  참석자 서명부 각 1부.  끝.