문서번호	시설과-2094
결재일자	2020.6.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	조경팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
홍정표	이종무	김재균	06/11 박미애
협 조

- 2020년 남산 및 산하공원 공원시설 정비공사 -

설계변경(정산) 검토보고

2020. 6.

중부공원녹지사업소

(시설과)

- 2020년 남산 및 산하공원 공원시설 정비공사 -

설계변경(정산) 검토보고

우리 사업소에서 추진중인 『2020년 남산 및 산하공원 공원시설 정비공사』 와 관련하여 현장여건 변동 및 추가공종 발생 등으로 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 함.

Ⅰ

공 사 개 요

❍ 위    치 : 남산 및 산하공원(간데메공원) 일대

❍ 공사기간 : 2020. 04. 14. ~ 06. 12.

❍ 공사개요

- 식재공사 : 사철나무 60주 이식

- 시설물 설치공사 : 파고라, 운동기구, 목재데크 및 휀스 설치 등

- 포장공사 : 고무칩포장, 화강석블럭포장, 마사토포장 등

- 철거 및 기타 : 안내판, 포장, 데크 및 안전휀스 철거 등

❍ 도 급 비 : ***********************************

❍ 시 공 사 : ******************************

❍ 공 정 률 : 약 95%

Ⅱ

그간 추진사항

❍ 2020. 01. 06 : 계획수립

❍ 2020. 03. 14 : 실시설계용역 준공

❍ 2020. 03. 23 : 공사발주

❍ 2020. 04. 14 : 공사착공

❍ 2020. 05. 14 : 공사 실정사항 검토보고

Ⅲ

설계변경사유 및 공사비 변경내역

❍ 주요 변경사유 및 변경내용

- **************************************

************************

- ************************************

- **********************************

***********************

**************************************

- *************************

*********************************************************

- *************************************

****************

*******************************************

*******************************************************

- ****************************************

**************************************************

- ****************************************

*********************************************

*************************************

❍ 공사비(도급비) 변경내역                                       (단위 : 원)

구 분		금 액			비고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비		***********	***********	************
도급액	공급가액	***********	***********	************
	부 가 세	**********	**********	***********
	소 계	***********	***********	**************
관급자재비		**********	**********	***********

Ⅳ

예산집행 계획

❍ 예산조치 : ***************************************

*****************************************

❍ 예산과목 : 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원

보수정비사업, 남산 및 산하공원 시설물 보수 정비, 시설비및부대비, 시설비

Ⅴ

검 토 의 견

❍ 지역주민 불편 민원을 해소하고 안전사고 예방을 위해 휴게데크 정비 등을

본 공사에 반영, 조속히 설계변경(정산)하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

≪ 위치도 및 현황사진 ≫

백범광장 휴게데크 위치도	백범광장 휴게데크 정비대상지
야외식물원 휀스이설 위치도	야외식물원 휀스이설 대상지

붙임  1. 계약금액조정 제비율 검증확인서 1부

2. 설계변경 물량내역 1부

3. 설계변경 내역서 1부.   끝.