문서번호	현장민원과-8623
결재일자	2020.6.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		현장민원과장	강서수도사업소장
서주태		추경민	06/11 정진일
협 조

2015~2017년 재질기준 초과

수도계량기 교체공사 시행 계획

2020. 6.

강서수도사업소

(현장민원과)

2015~2017년 재질기준 초과

수도계량기 교체공사 시행 계획

과거년도(2015~2017년)납품된 수도계량기 중  재질이 우리시 기준에 맞지 않는 일부 계량기의 교체공사를 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 제293회 임시회 환경수자원위원회

○ 송명화의원 : 재질기준 초과 계량기 교체를 위한 사업비 조기 집행

□ 2020년도 상수도사업본부 예산안에 대한 수정안(시의회)

○ 수도계량기 교체 60억원 증액

□『수도계량기 교체공사 시행 계획』(계측관리과-4854, 2020.5.27)

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 강서수도사업소 수도계량기 교체공사

□ 공사위치 : 강서수도사업소 관할지역 내(양천구, 강서구, 구로구)

□ 공사내용 : 소형 수도계량기 5종 9,630개 교체

□ 공사기간 : 2020.08 ~ 2020.11

□ 소요예산 : 508백만원(도급비 237백만원, 관급비 271백만원)

□ 예산과목 : 수도계량기 교체, 수선유지교체비 급수계량기교체비

Ⅲ		추 진 계 획

□ 추진방법

○ 상수도사업본부 : 계약심사 및 일상감사 일괄 추진

○ 수도사업소     : 공사발주 및 감독

□ 입찰(계약방법) 및 낙찰자 결정

○ 입찰방법 : 일반공개경쟁입찰

○ 입찰자격 : 건설산업기본법 제2조에 따른 전문공사업자로 기계설비공사업                   또는 상·하수도설비공사업을 등록한 업체

○ 낙찰자 결정 : 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(시설공사 적격심사)

※ 공사계약 및 적격심사 기관 : 서울시 재무과

○ 현장설명 : 미실시(지방계약법 시행령 제15조 제3항의 단서 규정에 의거 생략)

□ 관급자재(수도계량기)구매

○ 발주방법 : 조달구매(다수공급자계약 2단계경쟁)

- 본부 계측관리과에서 구매 및 검수

- 납기는 45일 이내로 교체공사 계약과 동시 착공을 위해 선 구매 발주

○ 구매수량

구경	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm
수량(개)	9,630	8,400	170	408	452	200

○ 계량기 재질

- 15mm : 폴리케톤 계량기(8,400개)

- 20mm ~ 40mm : 무연황동 계량기(1,230개)

구 경	기 존(무연황동 계량기)	변 경(폴리케톤 계량기)
15mm
20mm ~ 40mm	무연황동 계량기

○ 구매 시기 : 2020.6.~ (2~3회 분할 구매)

○ 자재 지급 : 수도자재관리센터에서 불출

- 지급자재 요청은 공사계약 후 착공이전 자재센터와 협의하여 수령

○ 교체품 회수 : 수도사업소(계약업체)에서 수도자재관리센터에 반납

○ 관급자재비 : 271백만원

Ⅲ		향 후 일 정

□ 2020.  7.  : 교체공사 발주

□ 2020.  8.  : 교체공사 착공

□ 2020. 11.  : 교체공사 준공

Ⅳ		행 정 사 항

□ 서울시 재무과   : 입찰공고, 적격심사 및 공사계약

□ 본부 계측관리과 : 계약심사 및 일상감사 의뢰, 관급자재 구매

□ 수도사업소      : 공사발주 및 감독

□ 수도자재관리센터 : 신품계량기 출고, 교체품 입고,  끝.