문서번호	계약심사과-10792
결재일자	2019.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목심사2팀장	계약심사과장		재무국장
박홍	노형근	김수정		06/13 하철승
협 조

잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선공사 실시설계 설계 경제성 심사(VE) 결과보고

2019. 6.

재  무  국

(계약심사과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□	시설물 안전관리 검토
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선공사 실시설계

설계 경제성 심사(VE) 결과 보고

도시기반시설본부(토목부) 시행 「잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선공사 실시설계」에 대한 설계 경제성 심사(VE) 결과를 보고 드림

1		사업개요

□ 신청부서 : 도시기반시설본부(토목부)

□ 용  역  명 : 잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선공사 실시설계

□ 위    치 : 잠실·천호대교 남단IC

□ 사업내용 : 연결로 구조개선 2개소

- 잠실대교 남단IC : 폭1차로(지하차도 L=299m, 교량 L=33m, 연장 3.66㎞)

- 천호대교 남단IC : 폭1차로(지하차도 L=197m,  연장 3.24㎞)

□ 공 사 비 : 69,100백만원

□ 사업기간 : ’14. 1. ~ ’22. 12.

□ 설계공정률 : 90%

2		심사개요

□ 심사기간 : ’19. 5. 10. ～ ’19. 5. 21.(기간 중 3일)

□ 장      소 : 계약심사과 회의실 및 잠실·천호대교 남단

□ 전문가구성 : 12명(외부전문가 7명, 내부공무원 5명)

□ 심사내용

- 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

- 공사 시행의 적정성, 시설물 안전성 검토

- 시설물 안전 및 이용자 편의성 반영 등

3		심사결과

① 성능향상 : 아이디어 78건을 제안하여 74건 채택【채택률 94.9%】

② 비용절감 : 공사비 67,024백만원에서 941백만원 절감【절감률 1.4%】

□ 설계VE 검토결과

- 유형별 제안건수 및 절감액

(단위: 건, 백만원)

	예산 절감	건 수	4
		절감액	-357
	시공성 향상	건 수	8
		절감액	-195
	유지관리성 향상	건 수	3
		절감액	33
	편의성 강화	건 수	1
		절감액	-7
	안전성 강화	건 수	6
		절감액	-138
	친환경성	건 수	1
		절감액	-277
	설계 보완	건 수	51
		절감액	-

- 비용절감 및 가치향상

(단위: 점, 백만원)

비 용(C)			성 능(P)			가 치(V=P/C)
공사비	절감액	절감률	원안	대안	개선율	원안	대안	향상률
67,024	941	1.4%	100	120.4	20.4%	100	121.8	21.8%

- 주요 대안내용

1)【시공성 향상】잠실대교 Ramp구간의 차수그라우팅 높이를 조정하자 (지표면 → 지하수위 높이로 조정) ․ 절감액 : 285백만원 ⇒ 과다설계된 차수그라우팅을 현장내 지하수위에 맞춰 최적화하여 예산절감 및 시공성을 향상시킴	↓

2)【예산절감】PE방호벽을 PE드럼으로 변경하자 (PE방호벽 → PE드럼으로 조정) ․ 절감액 : 270백만원 ⇒ 주변교통여건에 따른 최적의 교통안전시설을 조정하여 예산절감 및 시공성을 향상시킴	↓

3)【유지관리성 강화】전력계통구성방식을 조정 (동일 2회신 수전 → 1회선+UPS방식 조정) ․ 증가액 : 23백만원 ⇒ 수내전반 하부에 기초앵커볼트를 설치하여 안전성 향상 및 유지관리성 향상시킴	↓

4		행정사항

□ 설계경제성 심사 결과통보(도시기반시설본부) : ’19. 6. 13.(목)

□ 계약 심사 의뢰 : 지하안전영향평가, 소규모환경영향평가 등 관계기관 협의 이후 계약심사 요청 예정

※ 관련공문 : 계약심사 일정 변경요청【토목부-10247, ’19.6.12.】

붙임 1. 설계 경제성 심사 제안 채택목록(74건) 1부.

2. 설계 경제성 심사 결과 보고서(별도) 1부.

3. 설계 경제성 심사 참여자 목록 1부.  끝.