문서번호	시설관리과-14077
결재일자	2020.6.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
서영인	김대용	代박종일		06/11 이재호
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

「2019년 묵1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)」

설계변경(3차,최종) 시행 보고

2020. 6.

동부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

「2019년 묵1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)」

설계변경(3차,최종) 시행 보고

우리사업소에서 시행중인 『2019년 묵1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)』와 관련하여 본부 안전총괄과로부터 시공물량 증·감 및 신규공종 발생 등에 따른 계약금액 조정 검토를 완료하고 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

※ 관련근거 : 계약금액조정 결과 통보[본부 안전총괄과-6059(2020.06.11.)]

공사현황

가. 공 사 명 : 2019년 묵1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

- 당초 : D=13~300mm, L=1,677m

- 변경 : D=13~400mm, L=1,948m(증 271m)

다. 계약기간 : 2019. 6. 20 ~ 2020. 6. 30

라. 계약상대자 : 대동건설(주) 대표 차동옥

마. 설계변경 금액 : **********************

▶ *************************************

2. 관련근거

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제74조 제1항

① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사계약에서 설계 변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생하였을 때에는 법 제22조제1항에 따라 해당 계약금액을 조정한다.

나. 「공사계약 일반조건」 제6절 공사 설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정

3. 설계변경 현황

가. 설계변경 사유

- 현장여건 변화에 따른 시공물량 증감 및 신규공종, 신규 사급자재 발생

나. 설계변경 세부내역

- 시공물량 증,감 현황

· 증가 : A-파쇄물운반(0.18상차비별도) 등 139개 공종

· 감소 : 잔토처리(0.7상차비별도) 등 234개 공종

- 신규공종 및 신규 사급자재 발생

· 신규공종 : 부단수천공분기점분기(300*13~20mm) 등 10개 공종

· 신규자재 : 누수방지새들(80/140) 등 4개 사급자재

- 산재, 고용보험료 등 재경비 변경

4. 계약금액 조정결과

(단위:원)

구분	당초	변경	증·감	비고
******	***********	***********	************
****	***********	***********	************
*****	**********	**********	***********

5. 조치계획

가. 상기와 같이 『2019년 묵1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 본부 안전총괄과 조정 내용을 반영하여 설계변경 시행코자 합니다.

붙임: 1) 계약금액 조정결과 통보 1부.

2) 계약금액 검토결과서 1부.

3) 변경내역서(당초, 변경) 각1부.  끝.