코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	서울시 하수도 사업관리 용역(총차 및 장기-4차) 변경계약 의뢰

1. 재무과-69055호(2019.12.26.) 및 물재생계획과-8170호(2020.06.10.)와 관련입니다.

2.「서울시 하수도 사업관리 용역」변경계약을 아래와 같이 요청하오니 처리하여 주시기   바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울시 하수도 사업관리 용역

나. 용역기간 : 2020.01.02. ~ 2020.06.16.

다. 변경내용 : 총차 및 장기-4차 용역비 변경

(단위 : 원)

구 분		총차 (’17.7.~’20.6.)	4차 (’20.1.~’20.6.)	비고
용역비	당초	2,739,379,500	908,355,500
	변경	2,027,224,000	196,200,000
	증·감	감)712,155,500	감)712,155,500

라. 변경사유 : 하수도 사업관리 및 현장조사비 물량 증·감에 의한 설계변경

마. 예산과목 : 공기업하수도사업특별회계, 물재생계획과, 사업비용, 영업비용, 관거비, 연구개발비, 연구용역비

붙임 : 1. 준공보고 방침서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의각서(별도 송부) 1부.  끝.

	물재생계획과장
주무관	강청금		하수관리팀장	이한복		물재생계획과장	06/11 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-8175	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 물재생계획과	/
전화	02-2133-3791	/전송	02-2133-1042	/		/	부분공개(5)