문서번호	도로보수과-5223
결재일자	2020.6.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
황태선	이화신	06/12 고영준

『2020년 도로 및 교통부속물유지보수공사(연간단가)』 작업지시(2차)완료 보고

2020. 6.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2020년 도로및교통부속물 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(2차) 완료 보고

우리사업소에서 시행중인 「2020년 도로및교통부속물 유지보수공사(연간단가)」와 관련 2차 작업지시가 완료되어 이에 검토 보고 드림

▢ 사업개요

∘ 공 사 명: 2020년 도로및교통부속물 유지보수공사(연간단가)

∘ 공사개요

- 도로및교통부속물 세척 : 11,000㎡

- 과속방지턱 도색       : 1000㎡

- 도로표지병 설치       : 1,260개

∘ 총공사비: *********

- 도급비: *********

- 관급비: ********

- 이전비: ********

∘ 도 급 자: **************

▢ 2차 작업완료 내용

∘ 작업기간: 2020. 05. 08. ~ 06. 19.

∘ 작업구간: 정릉로, 화랑로 2개 노선

공 종	정비물량(㎡)		증·감
	작업지시	작업완료
중앙분리대 세척	4750.8	5,163	증) 412.2
충격흡수시설 세척	355.16	0	감) 355.16
무단횡단금지시설 설치	360	0	감) 360
무단횡단금지시설 철거	480	0	감) 480

※ 지속적인 코로나19 발생으로 광화문광장 집회·시위 제한으로 임시펜스      설치 및 철거 작업 추후 실시

∘ 세부작업내용

연번	노선	위치	공 종	정비물량(㎡)		증·감
				당초	변경
1	정릉로	정릉로119 등 18개소	중앙분리대 세척	3,837.2	3,729.4	감) 107.8
2	화랑로	화랑로253 등 6개소	″	913.6	1,433.6	증) 520
계				4,750.8	5,163	증) 412.2

∘ 예산집행현황

(단위: 천원)

구분	계약금액	전회 작업완료	2차 작업완료	잔 액	비 고
도급비	301,848	137,060	82,060	82,728	중앙분리대 세척
관급비	72,930	-	-	72,930
이전비	24,000	3,344	-	20,656
합계	398,778	140,404	82,060	176,314

▢ 조치계획

∘ 『2020년 도로및교통부속물 유지보수공사(연간단가)』에 시공물량을 반영하여 실정산하고자 함.

붙임  1. 공사완료사진(별도보고) 1부.

2. 작업완료보고서 1부.  끝.