문서번호	도시철도설비부-5816
결재일자	2020.6.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
전문관	송변전과장	도시철도설비부장
문학준	백성현	06/12 김영수

도시철도 하남선(5호선연장) 1단계 전차선공사(제3차) 시행 계획

2020. 6.

도시기반시설본부

도시철도설비부

도시철도 하남선(5호선연장)

1단계 전차선공사(제3차) 시행 계획

도시철도 하남선(5호선연장) 1단계 전차선공사(제3차)를 다음과 같이 시행하여 원활한 잔여 공정 추진에 철저를 기하고자 함.

■ 사업개요

❍ 공 사 명 : 도시철도 하남선(5호선연장) 1단계 전차선공사

❍ 공사구간 : 하남선 H1~H3정거장

❍ 계약금액 : **************************************

❍ 공사기간 : *****************************************

❍ 시 공 사 : *****************************

❍ 감 리 사 : 세종기술(주) [설계사 : 디투엔지니어링]

■ 추진경위

❍ ’18.  7. 20 : 1단계 전차선공사 착공

❍ ’18. 11. 23 : 총차 변경계약 [준공기한 연기-계약금액 변경 없음]

❍ ’19.  6. 12 : 1차 변경계약 [계약 금액변경 없음]

❍ ’19.  6. 20 : 1차 준공

❍ ’20.  5. 29 : 2차 변경계약[계약 금액변경 없음]

❍ ’20.  6. 09 : 2차 공정률 100%

■ 예산집행(1~2차) 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계 약 금 액	집 행 내 역							잔 액
		계	선 금	기 성 및 준 공
				소 계	1회	2회	노무비 (대금e)	준공
***	*****	*****	*	*****	***	*****	*	****	***
***	*****	*****	*	*****	***	*****	*	*****	*
***	***	***	*	***	*	*	*	***	*
***	***								***

■ 전차선공사 3차 계약내역

❍ 공사규모

- 1차분

· 지지금구 1,925개소, 앙카링 40개소, 지지애자 2,139개소, AL T-Bar 10,140m, 표지류 설치 507개소

- 2차분

· 케이블 포설 2,666.5M

- 3차분

· 전차선(Trollery Wire) 설치 275M, 케이블 포설 805.88M, 표지류 설치 36개소

❍ 계약금액 및 공사기간

구 분	계약금액 (원)	계 약 기 간	비 고
총차	*************	***********************
1차	*************	***********************	준공
2차	***********	***********************	준공예정
3차	300********	***********************	금회분
잔여	477,021,702	***********************	장래

■ 책임감리 검토의견

❍ 2차분은 6.09일 현재 공사(공정률100%)를 완료.

❍ 3차 계약 설계내역 검토결과 적정하며, 후속공정을 감안하여 3차 공사의 계약을 추진하여 원활한 공정관리가 되도록 함이 타당함.

[ 관련근거 : 서지 하남선(감) 제 20-227호 (`20. 6. 12] ]

■ 조치계획

❍ 본 공사는 장기계속공사로써 차수별 계약에 의거 진행함에 제3차 계약건의 공사(공정률100%)를 완료되었고, 제3차분 전차선공사를 계약하여 원활한 공사추진을 함으로써 개통일정에 차질이 없도록 시행코자 함.

붙임 : 2단계 전차선공사 제3차 계약요청 및 감리 검토 보고서 1부. 끝.