문서번호	도로관리과-9602
결재일자	2020.6.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	포장조사평가팀장	도로관리과장		안전총괄관
박은민	백종은	김진효		06/15 김홍길
협 조

2020년 도로 노면표시 시험시공 및 성능평가 추진계획

2020. 06.

안전총괄실

(도로관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 도로 노면표시

시험시공 및 성능평가 추진계획

도로 노면표시 도료와 유리알에 대한 품질성능 검증과 시공방법의 표준화를 위한 시험시공 및 성능평가 계획을 보고 드림

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 서울시 노면표시 재귀반사도(우천) 상향 조정(도시교통실, ‘19.1.)

- 상향된 재귀반사도에 맞는 시공 방법 및 재료 선정 기준 필요

○ 행안부「도로교통법 시행규칙」개정 시 기준 신설(’19.6.)

- 재귀반사도 기준이 도로교통법 준수사항으로 격상되었으나 재료 선정 기준 부재

○ 2020년 도로 노면표시 정비 계획(도로관리과-7051호, ’20.4.)

- 노면표시 시험시공 및 성능평가(’20년) 후 다양한 고성능 재료 확대 적용

□ 추진내용

○ 도료 및 유리알 성능평가를 위한 시험시공

- 조달등록된 KS 도료(4종, 5종)에 대한 품질성능 비교 및 시공성 검토

- 유리알(2호 이상)에 대한 품질성능 및 시공성 검토

○ 서울형 5종 시공 표준품셈 제시

- 건설공사 표준품셈에 누락된 5종 도료 시공에 대한 서울형 맞춤 표준품셈 제시

○ 서울시 노면표시 공사 설명서 개정

- 시험시공 및 성능평가를 바탕으로 노면표시 공사 설명서 개정

Ⅱ		시험시공 및 성능평가 계획

□ 시험시공 계획

○ 목    적 : 도료 및 유리알의 현장 적용을 통한 성능평가

○ 기    간 : ’20. 06. ~ 08. (※현장상황에 따라 변동가능)

○ 참여업체 : 일반(4,5종 도료) 및 신규(돌출, 발광, 고무 등) 공법 업체

일반 공법		신규 공법
- 노면표시 개선을 위한 성능평가 - 협회 및 조합에서 희망업체 모집 - 자발적 업체 참여 및 비용 부담		- 기술 개발 유도를 위한 시범적용 - 기술력 보유 업체(신기술, 특허 등) - 발주처 비용 부담

○ 시공방법

- 재료

․ 도    료 : 4종, 5종(내구성 P6(200만회) 등급 이상 동일 재료)

․ 색    상 : 백색, 황색, 청색

․ 유 리 알 : 1호와 2호 이상 유리알 혼합(혼합비 6:4, 7:3, 8:2)

※ 유리알 살포량은 경찰청 매뉴얼 기준 참고, 업체 간 유사하게 시행

- 시공 : 현장여건에 따라 수동식과 기계식 장비 선택 적용

※ 5종 도료는 가능한 기계식 적용

(참고)경찰청 매뉴얼(2012년) 유리알 살포량

<표 부록-10> 차선 설치시 수동식 및 기계식의 유리알 살포량

(10㎡당)

설치방식	수량(kg)	비고
수동식	3.1
기계식	4.2

<표 부록-11> 우천시 수동식 및 기계식의 유리알 살포량

(10㎡당)

설치방식		수량(kg)	비고
수동식	일반형 유리알	1.86
	기능성 유리알	1.24
	합계	3.10
기계식	일반형 유리알	2.52
	기능성 유리알	1.68
	합계	4.20

○ 시공구간

- 대상구간 : 총 14개소(도로사업소별 2개소, 시설공단 2개소), 연장 19.6km

․ 유지보수 및 복구도색 공사 구간 각각 7개소씩 선정, 1개소 당 연장 1.4km

․ 1개소 당 7개 구역 분할, 1개 구역 당 연장 0.2km 이상

- 선정기준

․ 도로 및 교통 환경이 유사하고 중앙분리대가 없는 편도 3~4차로 규모의 도로

․ 연장이 부족한 경우 동일노선 내 분할 가능

※ 세부 시공위치는 사업소 및 시공업체와 협의 후 결정

※ 신규 공법 중 발광형, 고무형 등의 시험시공은 향후 협의 후 결정

- 구간예시

200m 유리알(6:4)	200m 유리알(7:3)	200m 유리알(8:2)	200m 유리알(6:4)	200m 유리알(7:3)	200m 유리알(8:2)	200m 돌출형
4종 도료(600m)			5종 도료(800m)

※ 돌출형 차선은 중앙선과 길 가장자리에만 적용

○ 성능평가

목적 : 노면표시 재료/공법별 야간‧우천 시 시인성 및 내구성 평가

- 기간 : 시공 후 1주일 ~ 1년

․ 시공 후 6개월까지는 기술용역업체에서 평가, 이후에는 도로관리과에서 평가

- 대상 : 시험시공 14개소

- 항목

․ 재귀반사도 : 차선별 1km 당 2개소를 측정(휴대용 측정기 이용)

․ 내 구 성 : 도료 및 유리알 파손, 탈락, 마모 등

․ 기      타 : 제설제, 교통량, 도로형상 등에 의한 영향

□ 성능평가 용역

○ 용 역 명 : 서울특별시 도로 노면표시 추적조사 및 성능평가

○ 용역기간 : 계약 후 2020년 12월까지

○ 소요예산 : 16,500천원

- 예산과목 : 안전총괄실 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 도로포장 품질향상, 시설비

○ 과업내용 : 도로 노면표시 시험시공구간 추적조사 및 시공방법 제시

- 도로 노면표시 유리알 선정 기준 및 표준화된 시공방법 제시

- 5종 시공 서울형 표준품셈 제시

- 서울시 공사 설명서 개정

○ 용역시행방법

- 입찰방법 : 수의계약

․ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호

․ 노면표시 추적조사 및 성능평가 용역 추정가격이 1,500만원 이하로 신속한 업무추진을 위해 수의계약 추진

- 대상업체 : **********

Ⅲ		향후 추진계획

○ ’20. 06. 15.  : 시험시공 대상지 선정	… 도로사업소, 서울시설공단

○ ’20. 06. 17.  : 시험시공 참여업체 모집	… 도로관리과

○ ’20. 06. 22.  : 시험시공 합동회의(도로관리과, 도로사업소, 참여업체)

○ ’20. 06.~08. : 시험시공 시행	… 참여업체

○ ’20. 06.~12. : 추적조사 및 성능평가	… 용역업체

○ ’21. 01.~07. : 시험시공 구간 추적조사	… 도로관리과

붙임  과업내용서 1부.  끝.