문서번호	교통운영과-9411
결재일자	2020.6.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★교통전문관		교통개선팀장	교통운영과장
박평근		김상훈	06/15 강진동
협조

「2020년 도로점용공사장」교통소통대책 자문회의 결과 보고(소위원회 제6차)

2020. 6.

교통운영과

「2020년  도로점용공사장」

교통소통대책 자문회의 결과 보고(소위원회 제6차)

제6차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회(소위원회)를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 자문회의 개요

○ 개최일자 : 2020.6.11.(목), 14:00~15:30

○ 참석 위원 : 5명 (당연직 : 4명, 위촉직 : 3명)

- 당연직 : 교통운영과장

- 위촉직 : ******************************

- 간  사 : 교통개선팀장

○ 자문대상 및 결과 : 총 5건

- 원안가결 1건, 조건부 시행 4건

□ 자문회의 결과

○ 공통사항

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

1) 강동수도사업소(올림픽로 장기사용 송배수관 정비공사)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
올림픽로, 천중로	‘20.6~11 (87일)	야간(22~06시)	1~2개차로	강동수도사업소 급수운영과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 3, 4단계 공사시 일부구간이 3개차로 점용으로 되어 있어 정체가 우려되므로 2개차로 점유로 변경하여 공사를 시행하기 바람

- 야간 공사시 라바콘 사용시 차로폭은 3.0m을 확보하기 바람

- 11단계 1일 공사구간을 표시하고, 교차로 영향권은 별도의 단계로 구분하여 처리계획을 제시하기 바람

- 교차로 및 보도 공사시 보행도우미를 추가 배치하기 바람

- 교차로 구간 공사시 23시 이후 공사를 시행하기 바람

2) 망우로 장기사용 송배수관 정비공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
망우로	47일	야간(22~06시)	1~2개차로	동부수도사업소 시설관리과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 중앙정류소 임시 폐쇄하여 공사시 보행도우미을 추가 배치하여 임시정류소 안내 등을 시행하여 공사를 시행하기 바람

- 교차로 공사시, 중앙정류소 임시 폐쇄시하여 공사시 공사시간은 23시 이후 공사를 시행하기 바람

- 10, 11단계 공사시 우회전이 어려우므로 가각정리, 정지선 후퇴 등을 시행하여 공사를 시행하기 바라며, 통제수를 추가 배치하기 바람

3) 용마2중블럭 무단급수체계 구축공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
망우로	77일	야간(22~06시)	1~2개차로	동부수도사업소 시설관리과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 8단계 주간 시간대 차로운영계획을 제시하기 바라며, 복공설치시 기존도로의 포장면이 일치하도록 조치하기 바람

- 교차로 공사시 통제수는 추가 배치하기 바람

- 교차로 구간 공사는 23시 이후 공사를 시행하기 바람

4) 가락지하차도 보수공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
가락지하차도, 양재대로	72일	24시간	1~2개차로	동부도로사업소 시설보수과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 방향별로 2개 지하차도로 운영중에 있으므로 1개 지하차도를 폐쇄하여 모든 공사를 진행하는 것이 도로의 포장 및 공사의 품질 등에 도움이 될 것으로 판단되므로 1개씩 지하차도를 폐쇄하여 공사를 진행하기 바람

- 5, 6단계는 가락시장사거리의 오전 첨두 시간도 분석에 포함하기 바람

- 공사처리계획이 변경이 되었으므로 분석을 다시 수행하기 바람

5) 약수역~버티고개역간 역세권 보행환경 개선공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
다산로	‘20.6~11 (183일)	야간(22~06시)	1개차로	중구청 도로시설과

○ 자문결과 : 원안 가결

붙임 : 1. 자문위원 참석명단 1부.

2. 공사업체 참석명단 1부.  끝.