문서번호	기전과-3242
결재일자	2020.6.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
양상규		임태수	06/15 변봉섭
협조

『2020년 교통신호기 신설 및 보수공사(제1구역)』

설계변경(제1차) 검토보고

2020. 6.

남부도로사업소

(기  전  과)

『2020년 교통신호기 신설 및 보수공사(제1구역)』

설계변경(제1차) 검토보고

『2020년 교통신호기 신설 및 보수공사(제1구역)』와 관련, 책임감리원으로부터 제출된 설계변경에 대하여 아래와 같이 검토결과를 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 시행령 제74조

공사실정 검토 보고[기전과-2836(2020. 5. 26.)]

【제1차 작업지시에 대한 공사실정 검토보고-제1구역】

감리업체[㈜건영이앤씨 건본(신) 2020-84(2020. 6. 12.)]

【제1차 설계변경 요청서 제출-제1구역】

Ⅱ		사 업 개 요

사업명 : 2020년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-제1구역)

사업위치 : 금천구, 영등포구 일부

사업내용 : 관내 교통신호기 신설 및 보수

계약금액 : *********************************

계약업체 : ************

계약기간 : 2020. 2. 20. ~ 12. 31.

책임감리업체 : *************

Ⅲ		설계변경사항

주요 설계변경 내용

- 현장 여건에 따른 물량 증·감

작업지시 번호	당초	변경	사유	비 고
1-38 1-39 1-56	가로등 암대 설치 1본 가로등 암대 설치 1본 가로등 암대 설치 1본	0본 0본 0본	영등포구청(도로과) 작업
1-01	1차 작업완료	차후 작업으로 연기	구청 토목공사(교통섬 이전) 지연
1-06	1차 작업완료	차후 작업으로 연기	구청 토목공사(보도확장) 지연
1-07	1차 작업완료	차후 작업으로 연기	구청 토목공사(보도확장) 지연
1-16	1차 작업완료	작업지시 제외 (공사타절)	횡단보도 확충정비공사 작업예정
1-34	1차 작업완료	작업지시 제외 (공사타절)	교통사고 잦은 곳 개선공사 작업예정
1-35	1차 작업완료	작업지시 제외 (공사타절)	교통사고 잦은 곳 개선공사 작업예정
1-36	1차 작업완료	작업지시 제외 (공사타절)	교통사고 잦은 곳 개선공사 작업예정

- 제1차 작업완료 주요 공정 물량 증감 내역

순번	주요공정	단위	수량			비고
			당초	변경	증·감
1	제어기완성품(표준형)(관급)교차로용	대	1	2	증 1
2	제어기부분품(L.S.U)	EA	1	2	증 1
3	차량신호등 설치(관급) 1면 3색,4색 2조 동시	조	14	6	감 8
4	보행신호등 설치(관급) 1면 2색	조	30	1	감 29
5	잔여시간표시기 설치(관급) 숫자형	조	1	54	증 53
6	음향신호기 설치, 브라켓식	대	30	10	감 20
7	교통신호등지주 신설(ø300㎜×8.5m)	본	1	1	-
8	교통신호등지주 신설(ø200㎜×8.5m)	본	1	23	증 22
9	교통신호등지주 신설(ø150㎜×8.5m)	본	1	4	증 3
10	신호케이블-지중1선(F-CVV,1.5SQ/5C)	m	1	458	증 457
11	전원선-지중1선(F-CV,6SQ/2C)	m	1	23	증 22
12	조가선-와이어로프(6㎜)	m	1	538	증 537

※ 세부내역은 설계변경 내역서 참조

설계변경금액 : 금액변경 없음

구분		금액(원)			비고
		당초	변경	증·감
도급비	공급가액	414,746,882	414,746,882	-
	부가가치세	41,474,688	41,474,688	-
	합 계	456,221,570	456,221,570	-

기성준공금액(제1차)

구분		금액(원)			비고
		계약금액	1차 기성금액	잔액
도급비	공급가액	414,746,882	353,978,000	60,768,882
	부가가치세	41,474,688	35,397,800	6,076,888
	합 계	456,221,570	389,375,800	66,845,770

책임감리원 기술검토 의견

- 제1차 작업지시 수행 중 현장여건에 따른 물량변경 사항 및 토목공정 지연, 개선공사 작업예정 구간 등을 반영하여, 설계변경을 시행함이 타당하다 사료됨.

Ⅳ		보고자 의견

책임감리원 설계변경 요청한 사항을 검토한 결과,

- 현장여건에 따른 물량변경 적용 및 토목공정 지연 구간 차후 작업으로 연기, 개선공사 구간 작업제외 등으로 책임감리원의 설계변경 검토의견이 타당함으로 이를 반영하여, 설계변경을 시행하고자 하며,

- 설계변경 후 제1차 작업지시 완료분에 대하여 기성준공하고자 함.

Ⅴ		행 정 사 항

‘20. 6. 15.  : 설계변경 시행

‘20. 6. 24.  : 기성금(제1차) 지급(금389,375,800원)

붙임 : 1. 책임감리원 설계변경 요청서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 실정보고 사항 검토보고서 1부.

4. 원가검증서 1부.  끝.