작업계획(암사정수센터 “급수운영과 소관 장비” 이전 설치)

문서번호	급수운영과-5378		결재	주무관		급수운영과장
				진효정		06/15 성기선
				협 조

작 업 명	암사정수센터 “급수운영과 소관 장비” 이전 설치
작업일시	2020. 6. 16.(화) 11시 ~ 16시
작업내용	▢ 작업배경 ○ 암사정수센터 중앙제어실 시설개선(리모델링)에 따라 급수운영과 소관 장비 이전 설치 요청 ********************************************** ************************************* ************************************* ▢ 이전위치 : 동일장소 3M 우측(통신랙 및 장비 전체 이전) ▢ 작업절차 ○ (10:50) 작업 회의 ○ (11:00) 수질․유량 임시 통신선로 구성 및 통신 확인 ○ (11:30) 수질․유량, 로컬서버 등 운영 통신선로 이설 ○ (13:00) 장비 오프(OFF) 후 장비 및 랙 이전 ※ 암사 수질․유량․원격감시서비스 일시 중단 ○ (14:00) 장비 온(ON) 후 수질․유량서비스 우선 개통 ○ (15:00) 수질․유량, 로컬서버 등 모든 서비스 정상동작 확인 ○ (16:00) 작업 종료(모든 서비스 정상유지 확인)
작 업 자 (3명)	************************************* **********************
기 타