문서번호	치수과-8861
결재일자	2020.6.15.
공개여부	부분공개
방침번호

지방시설주사		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
문철		백원기		민병기		06/15 손경철
협조

★ ◉

「옥수역 주변 사각형거 보수공사(1구간)」

공사현장 실정 보고

2020.  6.

성  동  구

(치수과)

공사현장 실정 보고

「옥수역 주변 사각형거 보수공사(1구간)」시행중 물돌리기 이후바닥 상태 노출에 따른 보수물량 추가 반영 등에 대하여 보고드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 현장 실정보고(옥수역 주변 사각형거 보수공사 1구간)

[건영2020-성동010호(2020.6. 10.)]

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명: 옥수역 주변 사각형거 보수공사(1구간)

○ 규    모: □3.0×2.0m  L=350m, 단면 보수 1,731㎡

○ 기    간: 2020. 5. 8. ~  11. 3.

○ 계 약 자: 신광에코로드이엔씨㈜  대표 김학일

○ 도 급 비: 575,374천원

Ⅲ		실정보고 및 검토내용

1) 바닥 손상부분 추가 반영(Sta.507.5~Sta.534, L=26.5m)

○ 시공사 의견

- 물돌리기 시행중 바닥면이 노출되어 바닥상태 확인한 결과, 골재노출 및 침식이 조사되어 금번 보수공사에 시행

○ 감리자 의견

- 바닥상태가 침식이 발생한 것으로 조사되어 금번 보수시 동일한 공법으로 병행공사 하는 것이 원가절감 및 시공 joint 가 발생하지 않아 내구성에 도움될 것으로 판단됨.

○ 검토 의견

- 물돌리기 후 감리단 및 시공사와 합동 현장조사 결과, 당초 설계에서 제외된 구간(Sta507.5~Sta534, L=26.5m)의 바닥상태도 본 공사구간내 다른 구간과 동일하게 골재 노출 및 침식이 조사되어 시공사 및 감리단에서 추가정비 요청한 사항은 타당한 것으로 사료됨.

바닥 추가구간 조사(원경)	바닥 추가구간 조사(근경)
재료분리(골재 노출 Sta.520)	재료분리(골재 노출 Sta.530)
재료분리(골재 노출 Sta.510)	재료분리(골재 노출 Sta.510)

2) 천정 보수물량에 반영된 헌치 부분을 벽체로 변경(도면 오기 수정)

○ 천정 78㎡(감) → 벽체 78㎡(증)

○ 물량 변경 확인내역

연번	구 분	규 격	당 초 (㎡)	변 경 (㎡)	증·감	비 고
1	단면보수	바닥	582.35	638	증)55.65
	열화단면 제거	기계	63.58	66.37	증) 2.78
	고압물 청소	-	1,731.96	1,787.61	증)55.65
	단면보수	바닥	582.35	638	증)55.65
2	단면보수 (전구간)	벽체	522.21	600.21	증)78.0
		천정	627.4	549.4	감)78.0

Ⅳ		예 산 조 치

○ 소요예산 22백만원은 본 공사의 집행잔액(108백만원) 범위내에서 활용

- 공사비(증·감) 대비표

구 분	금 액		증·감
	당 초	변 경
직접공사비	380,581,000	396,404,000	증) 15,823,000
제 경 비	194,793,000	201,296,000	증) 6,503,000
도 급 비	575,374,000	597,700,000	증) 22,326,000

Ⅴ		조 치 계 획

○ 위 건에 대하여 실정보고 승인 통보하여 공사 추진에 만전을 기하고,

추후 설계변경에 반영 정산하고자 함.

붙임:  실정보고 공문 1부.