더 가까운 이웃 더 편안한 동네, 행복성북
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2020년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가) - 제1회 설계변경

우리구에서 시행중인 「2020년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)」에  대하여 아래와 같이 제2회 설계변경을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2020년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)

2. 공사기간 : 2020.02.24. ~ 2020.12.31.

3. 도 급 자 : 대림환경㈜ 대표 김진만

4. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 · 감 내 역		비고
			증	감
총 공 사 비	933,583,280	1,033,583,000	99,999,720
도 급 비	614,583,280	823,129,000	208,545,720
관 급 비	133,000,000	79,401,000		53,599,000
이 전 비	186,000,000	131,053,000		54,947,000

마. 설계변경 사유 : 별첨

바. 예산과목

○ 하천 및 하수시설 정비, 하수시설 개량확충, 하수시설물 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비 (증 108,545,720원)

○ [서울시 재난관리기금] 재해 및 재난예방, 재난예방 및 복구, 재난예방(재난관리기금재난계정, 시설비 (증 100,000,000원)

붙 임 :  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.

4. 일상감사의견서 1부.  끝.

주무관							강충구				하수담당					오강일					치수과장					김윤기					건설교통국장						06/15 신수련
협조자				주무관							이지나					계약담당							정영임					재무과장								이계선
시행			치수과-9601										(						)		접수												(						)
우	02848					서울특별시 성북구 보문로 168 성북구청 치수과 (삼선동5가)																/			http://www.sb.go.kr
전화		02-2241-3635							/전송								/	rkdcndrn@sb.go.kr													/	부분공개(5)