문서번호	시설관리과-8792
결재일자	2020.6.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
정재필		송종학	06/16 한희선
협조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

(천호시장사거리~우성아파트 외 1개소 배급수관 정비공사)

천호1 도시환경 정비사업 중첩구간 공사제외

2020. 6.

강동수도사업소(시설관리과)

(천호시장사거리~우성아파트 외 1개소 배급수관 정비공사)

천호1 도시환경 정비사업 중첩구간 공사제외

『천호시장사거리~우성아파트 외 1개소 배급수관 정비공사』구간 중 일부 구간이 재건축 지역내 원인자 이설구간과 중첩되어 이 구간을 공사구간에서 제외 하고자 함.

공사 현황

○ 공사명: 천호시장사거리~우성아파트 외 1개소 배급수관 정비공사

○ 공사기간: 2019. 12. 23. ~ 2020. 9. 4.

○ 계약금액: 574,323,240원

○ 공사개요: 관부설 D=20~300mm, L=1,696m

○ 계약업체: ***********

검토 사항

○ 당초 1구간 시점이 천호시장 교차로부터 였으나, 교차로 구간 약 170m가 『천호1 도시환경 정비사업』원인자 이설 구간과 중첩 됨.

○ 재건축 현황

- 사업명: 천호재정비촉진지구 천호1도시환경정비사업

- 시행자: 천호1도시환경정비사업조합(*******)

- 건축규모: 지하5층~지상40층, 연면적 228,882㎡(아파트 999세대, 업무시설)

- 관련근거: 재건축 지역 내 상수도관 이설 조건부여

시설관리과-12991(2016. 6. 27.)『사업시행인가 협의 회신』

- 위치도

재건축 지역

공사구간

앞으로의 계획

○ 상기 검토 의견따라 공사구간에서 제외하도록 시설관리공단에 통보.

붙임  변경 설계도면 1부.  끝.