문서번호	설비부-8524
결재일자	2020.6.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
양우창		여인웅	06/16 임정규
협조

중랑물재생센터 총인처리시설

관급자재(용수공급장치) 실정보고 승인검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  6.

도시기반시설본부

(설비부)

중랑물재생센터 총인처리시설

관급자재(용수공급장치) 실정보고 승인검토

중랑물재생센터 총인처리시설에 소요되는 관급자재(용수공급장치)가 계약자 사정으로 납품이 불가함에 따라 계약을 해제하고, 공사 일정을 고려하여 사급자재로 전환을 위한 검토 보고임.

1		관련근거

○ 관급자재(용수공급장치) 사급전환 승인요청(중랑감 제20-281호,’20.6.5.)

○ 관급자재의 사급전환 요청 건(대원중랑 제2020-20 ’20.6.5.)

○ 총인용수공급장치 납품포기 각서의 건(진영 제2020-525 ’20.5.25.)

2		계약내용

○ 건    명: 중랑물재생센터 총인처리시설 용수공급장치 구매

○ 계 약 자: ㈜진영이엔지 대표 한재웅(충북 음성군 대소면)

○ 계약방법: 수의계약(5천만원 이하 소기업 소상공인)

- 인도조건: 납품장소 하차도

○ 계약금액: 21,114,500원

○ 계약기간:′19.12.19. ~ ′20.6.30.

<용수공급장치>

총인처리시설의 최종 처리수를 약품공급관, 가압부상조, 슬러지농축조 등 총인처리 공법시설에 24시간 일정한 압력(50mH)으로 세정수를 공급하는 설비

3		검토내용

□ 그간 경위

○′19.12.26. 착수계 제출

○′20. 4.10. 제작도서 제출(1차)

○′20. 5.11. 제작도서 승인 통보(중랑감 제20-232호)

○′20. 5.25. 납품포기 각서 제출(진영 제2020-525호)

- 포기사유: 회사 사정(대표자 연락두절 및 자금집행 불가)

○′20. 5.28. 계약이행 촉구 내용증명 발송(중랑감 제20-260호)

- 수취인 부재로 반송(′20. 6. 5.)

□ 계약해제 및 수급방법변경 관련규정

○ (계약예규)물품구매(제조)계약일반조건 제26조(계약상대자의 책임있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지)제1항 제2호

- 계약상대자의 귀책사유로 인하여 납품기일내에 납품할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될 경우

○ (계약예규)공사계약 일반조건 제19조의6(소요자재의 수급방법 변경)

- 소요자재의 사급전환 요건: 관급자재 등의 공급지체로 공사가 상당기간 지연될 것이 예상되어 시공사가 대체 사용승인을 신청한 경우

□ 용수공급장치 납품지연시 문제점

○ 용수공급장치는 총인처리 공법시설에 균일한 압력으로 세정수를 공급하는 주요 설비임.

○ 설치 일정은 6월 말~7월 초, 설치 장소는 지하 중간층으로 타 장비보다 先 반입하고 이후 배관 연결공사를 진행해야 함으로 납품이 지연되는 경우 전체 공정과 종합 시운전에 차질이 있음.

□ 건설사업관리자 검토의견

○ 대표자(한재웅) 연락 두절, 납품 촉구 공문 반송 등으로 계약기간 내에 납품될 가능성은 전혀 없다고 판단됨.

○ 계약상대자의 귀책사유로 계약을 해제하고 대체품 확보방안을 검토한 바, 재 발주시 계약/도서승인/제작 등 상당한 기일 소요가 우려되고 준공 및 종합 시운전에 차질이 예상되어 사급으로의 전환을 요청함.

□ 보고자 의견

○ 용수공급장치 사급전환에 대한 건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하다고 판단되며, 공사의 시급성 감안하여 先 승인하고 향후 설계변경시 반영조치하고자 함.

4		조치계획

○ 계약해제 의뢰(총무부):′20.6.16.

○ 설계변경 반영 및 공사 준공:′20.10.

붙임: 관급자재(용수공급장치) 사급전환 실정보고(건설사업관리단) 1부  끝.