문서번호	운영과-3610
결재일자	2020.6.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
도형철	최영효	06/16 정훈모
협 조
	시설보수과장		임준빈
	주무관		안종필
	주무관		임정주

악취기술진단 착수보고 회의 개최

2020. 6.

중랑물재생센터

(운영과)

악취기술진단 착수보고 회의 개최

중랑공공하수처리시설 및 공공분뇨처리시설에 대한 악취 문제를 저감하고, 주변 생활환경을 보전하기 위한 악취기술진단 착수보고 회의를 개최합니다.

□ 회의개요

○ 안    건 : 악취기술진단 착수보고

○ 회의내용 : 악취기술진단 일정, 기술진단 방향 및 중점사항

○ 회의일시 : 2020. 6. 17. (수) 14:00 ~ 15:00

○ 회의장소 : 중랑물재생센터 본관동 3층 소장실

□ 회의내용

○ 악취기술진단 일정 개요

- 진단 착수: ‘20. 6. 9.

- 기초자료 조사: ‘20. 6. 15.~ ’20. 6. 26.

- 시설 및 공정 진단: ‘20. 6. 29. ~ ’20. 9. 19.

- 악취 배출공정 및 방지시설 악취물질 측정·분석: ‘20. 8. 3. ~ ’20. 9. 26.(총 8주)

- 중간 보고: ‘20. 9. 28. ~ ’20. 10. 3.(택 1일)

- 운영 진단, 시설개선 및 최적관리 방안 검토: ‘20. 10. 5. ~ ’ 20. 11. 14.(총 6주)

- 준공 보고 및 보고서 제출: 2020년 12월중

※ 현장 상황과 중간 진행 경과에 따라 변동사함이 있을 수 있음.

○ 악취기술진단 일정별 수행 업무 보고

○ 중점사항 협의: 원활한 기술진단 진행을 위한 협조사항 조율

○ 질의 응답

○ 참 석 자

- 중랑물재생센터 소장

- 각 부서 과장, 운영과 악취저감시설 담당 안종필, 악취총괄 도형철

시설보수과 악취설비 담당 임정주

- 악취기술진단 계약 사업자: ㈜태성환경연구소 문남구 상무 외 1명.  끝.