투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울대공원
수신	총무과장
(경유)
제목	해양관 돌고래이야기관 조성 건축공사 준공기한 연기의뢰

1. 시설과-4627호(2020.6.16.)와 관련입니다.

2. 서울대공원 해양관 돌고래이야기관 조성 건축공사에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울대공원 해양관 돌고래이야기관 조성 건축공사

나. 계약금액 : 금1,377,068,000원

다. 공사기간 : 2019.10.31.~2020.6. 16.

라. 계 약 자 : 계명건설(주) 대표 김영기

마. 공사기간 연장

변 경 전	변 경 후	비 고
2019.10.31.∼2020. 6. 16	2019.10.31.∼2020. 6. 26	10일 연장

1) 변경사유 : 용도변경 및 대수선 건축협의 지연에 따른 공사기간 부족

2) 귀책소재 : 서울대공원

붙임 : 1. 해양관 돌고래이야기관 조성 건축공사 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

							시설과장
주무관							김용주			시설과장					06/16 양희상
협조자				주무관						배진수
시행			시설과-4630									(						)		접수											(						)
우	13829					경기도 과천시 대공원광장로 102															/			http://grandpark.seoul.go.kr
전화		02) 500-7411						/전송			02) 507-7230					/	kyjoo@seoul.go.kr												/	부분공개(5)