문서번호	생태환경과-1948
결재일자	2020.6.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
김화시		이정환	06/16 김인숙
협조

- 2020년 난지 이용숲 조성사업 -

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

2020. 6.

한강사업본부

생태환경과

- 2020년 난지 이용숲 조성사업 -

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

한강변 울창한 숲조성을 위하여 시행중인「2020년 난지 이용숲 조성사업」과 관련하여 서울시설공단의 공사현장 실정보고에 대하여 아래와 같이 검토하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

※ 공사감독3처-4389(2020.06.12.) 공사현장 실정보고 승인요청

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 난지 이용숲 조성사업

○ 위    치 : 난지한강공원(잔디마당 주변)

○ 공사기간 : 2020. 04. 06 ~ 07. 04

○ 공사내용 : 수목식재(소나무 외 23종 16,661주), 수목생육환경개선 등

○ 도 급 비 :  금744,734,680원(관급비 금56,193천원)

○ 도 급 자 : 수림조경산업(주) 대표 유신열

▢ 현장실정 사항

구 분	현황 및 문제점	서울시설공단 검토요청사항	승인여부
식 재	○ 현장내 불량수목 및 고사목 대체 식재 및 그늘목 조성 필요	○ 현장여건에 맞게 식재물량 조정 ▸메타세콰이아(H6.0*B25): 0→8주 ▸왕벚나무(H4.5*B18): 86주→72주 ▸이팝나무(H4.0*R15): 16주→30주 ▸이팝나무(H4.0*R18): 0→24주 ▸이팝나무(H4.0*R20): 0→26주 ▸참느릅(H3.5*R15): 22주→15주 ▸낙우송(H5.0*R25): 35주→26주 ▸산철쭉(H0.5*W0.5): 3,159주→0 ▸산철쭉(H0.3*W0.3): 0주→1,900주 ▸화살나무(H0.6*W0.3): 0→90주 ▸황금사철나무(H1.0*W0.3): 0→200주	승 인

구 분	현황 및 문제점	서울시설공단 검토요청사항	승인여부
	○ 기 설계된 장미수종이 덩굴용으로 현장여건과 상이하여 화단용 장미 수종으로 수종 변경	○ 현장여건에 맞게 식재물량 조정 ▸장미(골드샤워, 13cm포트): 1,107주→0 ▸장미(안젤라, 13cm포트): 189주→0 ▸장미(스칼렛, 13cm포트): 549주→0 ▸장미(진태양, 13cm포트): 0→1,748주 ▸장미(마더스데이, 13cm포트): 0→1,748주	승 인
식 재	○ 현장내 답압으로 인한 잔디훼손구간 잔디식재 추가 및 초화류 식재수종 및 규격 변경	○ 초화류 및 잔디물량 추가 반영 ▸흰무늬억새(10cm포트): 650본→1,456본 ▸수크렁하멜론(8cm포트): 775본→1,748본 ▸억새모닝라이트(15cm포트): 700본→1,456본 ▸털수염풀(8cm포트): 1,025본→1,456본 ▸핑크뮬리(8cm포트): 825본→1,748본 ▸수선화(2~3분얼): 0→1,942본 ▸은사초(8cm포트): 0→1,748본 ▸줄사철(L=0.3): 0→2,900본 ▸삼색조팝(4치포트): 0→6,930본 ▸잔디(0.3*0.3*0.03): 591㎡→1,800㎡	승 인
식재공사	○ 한강 조망권 확보 및 개방감있는 공간조성을 위하여 관목물량 조정 및 식재위치 조정	○ 현장여건에 맞게 식재물량 조정 ▸박태기나무(H1.0*W0.3): 810주→450주 ▸꼬리조팝나무(H0.8*W0.4): 909주→460주 ▸조팝나무(H0.6*W0.3): 0→1,140주 ▸개나리(H0.8,3지): 180주→100주 ▸남천(H0.8,2지): 1,242주→630주 ▸옥매화(H1.0*W0.6): 2,079주→300주 ▸황매화(H1.0*W0.6): 2,331주→1,250주 ▸흰말채나무(H1.0*W0.4): 3,735주→1,890주	승 인
부대 공사	○ 교목 식재수량 증가에 따른 지주목 및 객토물량 변경 필요	○ 현장여건에 맞게 지주목 및 객토물량 추가 반영 ▸삼발이지주목(대): 315조→350조 ▸삼발이지주목(소): 34조→48조 ▸사각지주대: 22조→15조 ▸마사토: 779㎥→816㎥ ▸자연자갈: 471㎥→505㎥	승 인

구 분	현황 및 문제점	서울시설공단 검토요청사항	승인여부
관급 자재	○ 상기 현장 실정사항으로 인한 관급자재 물량 변경사유 발생	○ 현장여건에 맞게 관급자재 물량 변경 ▸장미(골드샤워,13cm포트): 1,140주→0 ▸장미(스칼렛, 13cm포트): 565주→0 ▸장미(안젤라, 13cm포트): 195주→0 ▸장미(진태양,13cm포트): 0→1,800주 ▸장미(마더스데이,13cm포트): 0→1,800주 ▸흰무늬억새(10cm포트): 670본→1,500본 ▸수크령하멜론(8cm포트): 798본→1,800본 ▸억새모닝라이트(15cm포트): 721본→1,500본 ▸털수염풀(8cm포트): 1,056본→1,500본 ▸핑크뮬리(8cm포트): 850본→1,800본 ▸수선화(2~3분얼): 0→2,000본 ▸은사초(8cm포트): 0→1,800본 ▸유기질비료: 1,864포→1,680포 ▸토양개량제: 899포→941포 ▸통기관: 956개→1,038개	승 인

▢ 계략 공사비 : 금879275천원(증78,347천원)

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	677,031,527	729,954,546	52,923,019
	부가세	67,703,153	72,995,454	5,292,301
	도급비계	744,734,680	802,950,000	58,215,320
관 급 액		56,193,000	76,325,120	20,132,120
총 공 사 비		800,927,680	879,275,120	78,347,440

▢ 보고자 검토의견

○ 위와 같이 승인 통보하여 선 시공후 추후 설계변경 시행 등 공사시행에 철저를 기하고자 함.

붙임 : 공사현장 실정보고 승인요청 공문 1부. 끝.