문서번호	정수과-2745
결재일자	2020.6.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정은준		이해원	06/12 이달영
협 조

「사업장폐기물(무기성 정수슬러지) 처리용역」 변경계약 계획

(2018. 6. 1.~2020. 5. 31.)

2020. 6.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

사업장폐기물(무기성 정수슬러지) 처리용역 변경계약 계획

환경

2018년 6월부터 시행 중인 「사업장폐기물(무기성 정수슬러지) 처리용역」과 관련하여 계약기간 종료 및 물량변동에 따른 변경계약을 추진하여 계약관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		계 약 현 황

건 명 : 구의아리수정수센터 사업장폐기물(무기성 정수슬러지) 처리용역(장기계속단가계약)

계약업체

- 처리업체 : ㈜씨엔에스

- 운반업체 : 전국환경운송주식회사

계약기간 : 2018. 6. 1. ~ 2020. 5. 31.(2년)

계약금액(3차) : 금242,884,130원(총용역부기금액 : 1,165,843,800원)

계약단가 : *********************************************

계약물량 : 24,000톤(2년)

차수	기간	금액(원)	처리물량(톤)	비고
1차	2018. 6. 1. ~ 2018. 12. 31.	***********	*****
2차	2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.	***********	******
3차	2020. 1. 1. ~ 2020. 5. 31.	***********	*****

Ⅱ		변경계약 내역

2020년 사업장폐기물 처리현황(3차)

○ 처리기간: 2020. 1. 1.~5. 31.

○ 처리물량:*******

○ 처리금액:**********************************

변경계약 내용

○ 변경사유: 사업장폐기물 처리용역(2018.6.1.~2020.5.31.) 계약종료에 따른 총차 및 3차분 계약금액 및 물량 변경

- 3차 계약금액

*********************************************

*********************************************

○ 세부 변경내역

- 차수별 금액                                            (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	변동사항	비고
총용역비		*************	*************	***********
차수별	1차(2018)	***********	***********	***********
	2차(2019)	***********	***********	***********
	3차(2020)	***********	***********	***********

- 차수별 계약물량                                        (단위: 톤)

구 분		당 초	변 경	변동사항	비고
총용역물량		******	******	******
차수별	1차(2018)	*****	*****	****
	2차(2019)	******	*****	******
	3차(2020)	*****	*****	****

Ⅲ		향후일정

변경계약 의뢰(행정관리팀): 2020. 6. 15.

준공검사: 2020. 6. 18. 이내

붙임: 1. 합의서 1부.

2. 변경내역서 1부. 끝.