“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(동선동1가 1-1~58호외 7개소 배급수관 정비공사)

1. 우리사업소에서 서울특별시시설관리공단에 위탁 감독의뢰하여 시행 중 인 『동선동1가 1-1~58호외 7개소 배급수관 정비공사』에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 동선동1가 1-1~58호외 7개소 배급수관 정비공사

나. 도 급 자 :*****************

다. 공사기간 : 2019.08.28.~2020.06.14.

라. 설계변경내용 : 물량증감 및 신공종발생

마. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비(시설비),노후상수도관(배급수관)정비

(단위 : 원)

구분	계약금액(당초)	계약금액(변경)	증 감	비고
도급비	712,216,280	620,026,000	감) 92,690,280
공급가액	647,923,891	563,660,000	감) 84,263,891
부가세	64,792,389	56,366,000	감) 8,426,389

붙임 : 1. 설계변경 심의위원회 개최 결과보고 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율 검증 및 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	전진영		시설안전팀장	유세종		시설관리과장	06/12 허준행
협조자
시행	시설관리과-13395	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2209	/전송	3146-2139	/	popu1211@seoul.go.kr	/	부분공개(5)