문서번호	시설관리과-10330
결재일자	2020.6.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	북부수도사업소장
주세진	代김성호	이승완	06/15 박병권
협 조

상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수

설계변경 및 계약금액 조정시행

(2019년 수유1동외 8개동 상수도공사)

2020. 6. 15.

북부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 및 계약금액 조정시행

(2019년 수유1동외 8개동 상수도공사)

우리사업소에서 시행중인『2019년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』의 시공물량 증·감 및 신규공종 발생 등으로 설계변경 및 계약금액 조정이 요구됨에 따라 본부에『설계변경 심의』를 요청하여 예산집행의 효율성 및 적정한 공사집행을 도모하고자 함.

※ 관련근거 :『2019년 상수도사업 계약심사 추진계획 통보』(안전총괄과-672호)

- 연간단가계약 공사(8천만원 이상) 도급비 증액 시

공사현황

공 사 명 : 2019년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

공사개요

**************************

***************************

계약기간 : 2019. 4. 12. ~ 2020. 6. 30.

도 급 자 : 창익건설  대표 김정애

도 급 비

**********************

**********************

**********************

보고내용

설계변경 사유

- 토공, 부설공, 구조물공 등 시공물량 증·감 및 신규공종 발생에 따른 변경

- 사급자재비 증가에 따른 변경

- 건강, 연금, 노인장기요양보험료 및 부지임대료 등 실정산에 따른 변경

시공물량 (증·감)현황

구 분	개 소		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
연장	***	*****	******
계	***	*****	******

계약금액 변경(조정) 내역                                      (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총공사비	***********	***********	*************
도 급 비	***********	***********	*************

공종별 변경내역                                           (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
토 공	***********	***********	**************
부 설 공	**********	***********	**************
구조물공	**********	**********	************
부 대 공	**********	**********	*************
포 장 공	*********	*********	************
사급자재비	**********	**********	***********

심사대상기준

- 심의기관 : 상수도사업본부 안전총괄과

- 대상기준 : 연간단가계약 공사(8천만원 이상) 도급비 증액 시

- 관련근거 :『2019년 상수도사업 계약심사 추진계획 통보(안전총괄과-672호)』

조치의견

위와 같이 물량 증․감이 발생되어 변경물량 공종에 대하여 계약단가로 적용하고, 신규공종에 대하여는 설계단가에 낙찰율을 적용코자 하며,

2019년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)의 계약금액 증액에 따른 설계변경 심사대상으로 상수도사업본부(안전총괄과)에 공사계약(설계변경 및 계약금액 조정) 심사의뢰하고자 합니다.

붙 임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.