투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계용역 설계변경 계약 의뢰

1. 토목부-11521호(2020. 6. 12.)와 관련입니다

2. 우리부에서 시행 중인「서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계용역」에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계용역

나. 용역규모 : 왕복4차로, 연장 8.1km, 친환경공간 조성 119천㎡

다. 용 역 사 : ㈜유신, ㈜도화엔지니어링, ㈜진우엔지니어링코리아, ㈜경동엔지니어링, ㈜도진엔지니어링

라. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비고
용역금액	2,141,955,000	2,186,955,000	증)45,000,000
용역기간	'19.11.16.~'20.11.15.	변경없음

마. 설계변경사유 : 지역 주민 민원에 따른 추가 검토사항******************을 설계 추가 반영

바. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성, 시설비(401-01)

붙임  1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(전체분, 2차분) 각 1부.

3. 예정공정표 1부.

4. 과업내용서(변경) 1부.

5. 합의각서 1부. 끝.

	토목부장
주무관	김종혁		토목설계과장	代조동협		토목부장	06/15 代진재섭
협조자
시행	토목부-11604	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층 서울시 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2591	/전송	02-3708-2599	/	mindle93@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)