문서번호	한양도성도감-6251
결재일자	2020.6.16.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장		문화본부장
왕승찬	정일선	안중호		06/16 유연식
협 조

설계변경 검토보고(1차 계약분)

(남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성공사)

2019. 6.

문  화  본  부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

설계변경 검토보고(1차 계약분 - 2회)

(남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성공사)

「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사」와 관련한 실정보고 승인에 따른 공사금액 증가 및 공기연장에 대한 설계변경 처리하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명: 남산회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성

□ 위    치: 중구 소파로 46외 13필지(사업지 면적 43,630㎡)

□ 공사내용

· 성곽유구 보호시설 1,440㎡, 인포센터 280㎡, 관람데크 143m

· 유구 보존처리, 멸실구간 흔적 형상화 74m, 토목·배수공사, 조경공사

□ 계약개요

· 계 약 자: 원택건설㈜, 명헌건설㈜

· 계약금액: ￦2,577,100천원(총차 ￦3,528,933천원)

· 공사기간(1차):’18.11.19.~’20.6.19.(총차 ’18.11.19.~’21.2.16.)

Ⅱ		설계변경 및 공기연장 검토내용

□ 관련근거

- 공사계약 일반조건 제19조(설계의 변경) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 공사계약 일반조건 제26조(계약기간의 연장)

- 서울특별시 공사계약 특수조건 제12조(설계변경 등)

□ 그동안 실정보고 승인내용

(금액단위: 천원)

구 분		내 용	금액	비 고
1회설계변경	1	기존 가설울타리 사용료 및 철거비 정산 (RPP판넬 높이2m, 길이 488m, 12개월사용)	13,000	한양도성도감 -586(’19.1.16.)
	2	공사장 출입문 설치(내역누락) (높이2~3m, 폭 8m, 양개도어)	4,764	한양도성도감 -1586(’19.2.18.)
	3	가설울타리 활용 한양도성 홍보 (높이3m, 길이 130m)	32,747	한양도성도감 -2965(’19.3.22.)
	4	청동기 주거지 보존(복토)을 위한 기둥간격 변경 설계비	12,969	한양도성도감 -4047(’19.4.18.)
소 계			63,100	’19.6.13. 변경계약
금회설계변경	5	지하 매립 콘크리트 폐기물 상차비 (폐기물 상차 건설장비대금)	2,192	한양도성도감 -5665(’19.6.3.)
	6	- 보호각 기초철근 누락분 반영 (철근D22, 1.588톤)	1,209	한양도성도감 -6626(’19.6.28.)
	7	- 보호각 철골공사 – 공사전 계약심사 완료 (철골 가공조립, 철골세우기, 용접, 녹막이 페인트, 조합페인트 등) - 평판재하시험	22,625 1,121	한양도성도감 -10576(’19.10.14.) 계약심사과 -19065(’19.11.5.)
	8	- 문화재보존처리(문화재수리기술지도단 의견반영 - 암석강화 및 습식세척 면적 증가)	22,652	한양도성도감 -11719(’19.11.14.)
	9	보호각 철골공사 장비사용료, 쌍줄비계 (철골용접용 쌍줄비계, 보호각 지붕재설치용 고소작업장비 사용료)	49,273	한양도성도감 -4345(’20.4.16.)
	10	지하 매설 소각폐기물처리 (10톤내외 소량, 신속한 처리를 위해 승인)	7,008	한양도성도감 -5117(’20.5.12.)
	11	장애물 없는 생활환경 인증을 위한 공사내역 반영 (배수로 덥개, 잠두화장실 경사로난간, 위생기구, 순성로 재포장 등)	45,543	한양도성도감 -5265(’20.5.18.)
	12	- 방공호 내부정리 및 석축 복구공사 현장내 석축돌 선별·운반 및 쌓기 나무 굴취 및 이식(52주) 분수대 방수 도로변 조경석 해체운반 기존 등산로 파손계단 복구 - 배수로 재질 및 잔디품종 변경(감액)	15,735	한양도성도감 -5850(’20.6.3.)
소 계(직접 공사비)			366,112

□ 준공기한 연기(공사기간 연장) 검토

- 공사기간 연장 요청내용

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
공사 기간	1차	’18.11.19.~’20. 6.19.	-
	총차	’18.11.19.~’21. 2.16.	’18.11.19.~’21. 4.8.	51일 연장 (매점이전 완료일 기준)

⇒ 남산 공원매점이 이전완료한 ’20.6.8.기준으로 51일 연장

- 귀책소재: 서울시(남산 공원매점 이전 지연)

- 연장사유

· 전시·관리실 건축예정지에 위치한 남산 공원매점이 이전 협상 결렬로 명도소송 등을 진행하였으며 관할법원으로부터 ’20.5.22. 명도가처분 결정되어 ’20.6.8. 철거·이전이 완료되었으므로 전시·관리실의 착공이 가능한 날을 기준으로 (총차)준공기한 연기가 타당함

- 지체상금 부과여부: 미부과

《남산 공원매점 철거 현황사진》

철거전	철거중	철거후

□ 감리원 검토의견

- 공사내역서의 원가계산서, 도급내역서, 견적서 등의 관련서류를 검토한 결과 적합하므로 설계변경이 적정하며,

- 현장내 토목공사중 지하에 매립된 소각폐기물 및 기존 폐기물 반출량을 폐기물 반출업체로부터 확인한 결과 적정함

- 남산 공원매점 이전지연으로 착공을 못하였으므로 공원매점 이전 완료일을 기준(’20.6.8.)으로 준공기한 51일 연기가 적정함

Ⅲ		처리의견

□ 우리시의 계약심사 절차를 거치고 감리자의 검토의견과 같이 공사금액 변경사항이 적정하므로 계약금액을 변경하고자 하며,

계약심사 근거: 계약심사과-19065(2019.11.5.), 계약심사과-10544(2020.6.13.)

□ 남산 공원매점의 이전지연으로 전시관리실의 착공을 못하였으므로 공원매점의 이전·철거가 완료된 시점(’20.6.8.)을 기준으로 총차 공사기간을 51일 연장하여 변경계약을 하고자 함

□ 계약금액 변경 및 공사기간 연장내용 요약

(계약금액 : 천원)

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
계약 금액	1차	2,577,100	2,905,883	증)328,783
	2차	951,833	1,130,559	증)178,726
	총차	3,528,933	4,036,442	증)507,509
공사 기간	1차	’18.11.19.~’20. 6.19.	-	변경없음
	총차	’18.11.19.~’21. 2.16.	’18.11.19.~’21. 4.8.	51일 연장 (매점이전 지연)

※ 야외 유적전시관의 임시개장을 위해 2차 계약공사분(토목, 조경)을 1차 계약 공사분에 포함하여 공사하기 위해 차수별 공사내용과 내역을 조정하였으며 포장공사는 ’20.7.15한 완료하고자 함

붙임 1-1. 감리자 의견제출 공문(설계변경 및 공기연장)  1부

1-2. 감리자 검토의견서(설계변경 및 공기연장)  1부

1-3. 감리자 검토의견서(폐기물 정산관련) 1부

2-1. 시공자 공문(설계변경 및 공기연장) 1부

2-2. 변경 공정표 1부.  끝.