“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	시설과장
(경유)
제 목	공사변경계약체결 안내 [수유6배수지 건설공사]

1. 시설과-2896(2020.06.15.)호와 관련하여『수유6배수지 건설공사』건에 대한 변경계약을 아래와 같이 체결하고 안내드립니다.

가. 건    명 : 수유6배수지 건설공사

나. 계 약 자 : **********************

다. 계약기간 : 총차 2017.12.13.~2020.6.15. (4차 2020.1.1.~2020.6.15.)

라. 계약금액 : [총차]*********************************

- 4차 ***************************

마. 변경사유 : 물가변동, 신공종 발생, 물량 증·감 등

바. 변경내역 :

(단위 : 원)

건 명	계약금액			비 고
	구분	당초	변경
수유6배수지 건설공사	전체	*************	*************	************
	4차	***********	***********	************

붙  임 :	공사변경계약서 1부.  끝.

	재무회계과장
★주무관	박은미		재무회계과장	전결 06/16 김분숙
협조자
시행	재무회계과-8538	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 요금관리부 재무회계과 (합동)	/
전화	02-3146-1232	/전송	02-3146-1209	/	shsarang@seoul.go.kr	/	부분공개(7)