투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	「경관조망지점 조성사업」설계변경 계약의뢰

1. 생태환경과-1931(2020.06.16.)호와 관련입니다.

2. 한강 자연성 회복 기본계획에 의거 한강을 찾는 시민들에게 역사문화 체험기회를 제공하고자 시행 중인「경관조망지점 조성사업」과 관련하여 붙임과 같이 설계변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

▢ 사업개요

○ 공 사 명 : 경관조망지점 조성사업

○ 위    치 : 여의도․잠원한강공원

○ 공사기간 : 2020. 4. 22 ~ 6. 20

○ 도 급 비 : 금68,057,200원

○ 도 급 자 : ㈜장원조경 대표 신경준

▢ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
도급액	공급가액	61,870,182	68,243,637	6,373,455
	부가가치세	6,187,018	6,824,363	637,345
	계	68,057,200	75,068,000	7,010,800

○ 예산과목 : 한강사업본부 생태환경과, 한강공원이용 및 생태환경개선, 한강 자연성 회복, 경관조망지점 조성, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 설계변경 내부품의서 1부.  끝.

							공원부장
주무관							김정화			생태환경과장					이정환					공원부장					06/16 김인숙
협조자				기획예산과장						문영일					총무과장							이상이
시행			생태환경과-1949									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-3780-0864						/전송								/													/	부분공개(6)