“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	암사 저양정계통 송수펌프 2차 시운전 결과 및 교체공사 시행 알림

1. 기전설비과-5794(2020. 6. 17.)호 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 『우면산가압장 급수체계 개선공사』 관련 암사 저양정계통 송수펌프 2차 시운전 결과 및 교체공사 추진 일정을 알려드리니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

3. 또한, 암사정수센터에는 공사가 원활히 진행될 수 있도록 적극 협조해 주시기 바라며. 시공사 및 감리단에서는 공사 준비 및 안전관리 등 건설사업관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

※ 공사기간: ‘20. 6. 17.(수)~8. 31.(월)

① 7호기 : ‘20. 6. 17.(수)~7. 10.(금) - 체크밸브 이상으로 우선 교체

② 5,6호기: ‘20. 7. 13.(월)~8. 5.(수) - 암사정수센터 우선 교체 요청

③ 1,2호기: ‘20. 8. 6.(목)~8. 31.(월)

붙임  1. 2차 시운전 결과보고 1부.

2. 시공계획서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	배수과장,시설과장,암사아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수시설과장),서울물연구원장,(주)태광이엔씨 대표 김승만,우면산가압장 급수체계 개선공사 감독권한대행등 건설사업관리용역 책임건설사업관리기술자
★주무관	이래운		기전설비과장	조성태		생산부장	06/17 서대훈
협조자
시행	기전설비과-5797	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1335	/전송	02-3146-1319	/	aero206@seoul.go.kr	/	부분공개(6)