문서번호	생태환경과-1971
결재일자	2020.6.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
김화시		이정환	06/17 김인숙
협조

- 2020년 뚝섬 이용숲 조성사업 -

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

2020. 6.

한강사업본부

생태환경과

- 2020년 뚝섬 이용숲 조성사업 -

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

한강변 울창한 숲조성을 위하여 시행중인「2020년 뚝섬 이용숲 조성사업」과 관련하여 서울시설공단의 공사현장 실정보고에 대하여 아래와 같이 검토하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

※ 공사감독3처-4489(2020.06.16.) 공사현장 실정보고 승인요청

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 뚝섬 이용숲 조성사업

○ 위    치 : 뚝섬한강공원(자연학습장 주변)

○ 공사기간 : 2020. 04. 06 ~ 07. 04

○ 공사내용 : 수목식재(소나무 외 21종 16,062주), 수목생육환경개선 등

○ 도 급 비 :  금788,199,600원(관급비 금64,361천원)

○ 도 급 자 : 제이마스터㈜ 대표 윤재갑

▢ 현장실정 사항

구 분	현황 및 문제점	서울시설공단 검토요청사항	승인여부
식 재	○생각마루 연계 광장 주변, 제3주차장 연접 산책로 그늘 제공 및 경관향상 필요 ○피나무(R20,R15) 수종 품귀로 수급 불가 ※ 조경수 협회 수급 불가 공문, 설계사 의견서 참조 ○추가 식재 등 물량 증가로 잔토(뿌리분) 물량 증가	○수변가 녹지 경관 향상을 위한 교목 추가 ▸대왕참나무(H4.5xR20): 0 → 54주 ○피나무 대체목으로 생육 특성 및 기능이 유사한 수종으로 변경하고 현장 여건에 따른 식재 위치 일부 조정 ▸피나무(H5.0xR20): 26주 → 0 ▸피나무(H4.5xR15): 25주 → 0 ▸산딸나무(H3.5xR15): 0 → 13주 ▸이팝나무(H4.0xR15): 0 → 12주 ○반출토사 물량 증가 ▸상차(토사,잔토): 664.35㎥ → 716.41㎥ ▸잔토(김포,15토): 664.35㎥→716.41㎥	승 인

구 분	현황 및 문제점	서울시설공단 검토요청사항	승인여부
식재	○소나무(장송)은 지하고가 높아 하부 피목율이 높은 줄사철로 경관 향상 ○녹지 진입부 관목식재지에 부합되게 경관성이 있는 식재 보완	○장송하부는 줄사철로 변경, 당초 원추리는 소나무(조형) 하부로 위치 조정 ▸줄사철나무(L0.3m): 0 → 2,500본 ○일부 잔디(줄떼) 식재 구간 등지에 경관향상 무늬억새 추가 식재 ▸잔디식재(줄떼): 270㎡ → 200㎡ ▸억새(딕시랜드, 21㎝): 0 → 480본	승 인
관급 자재	○ 수목 추가분에 따른 유공관 및 유기질비료 증가 ○ 공원 이용도를 감안하여 잔디보호매트 설치지역 조정 필요	○관급자재 조정 ▸유기질비료: 746포 → 792포 ▸유공관: 693개소 → 749개소 ○ 이용객 진입이 많은 곳(잔디 답압 가증에상)으로 위치 조정 ※ 위치 조정(물량 변경 없음)	승 인
식재 기반 공사	○마사토(운반, 상차) 설계서 물량과 상이	○마사토(운반,상차) 토취장 위치에 맞게 운반거리 조정 반영 ▸모래운반(상차): 470㎥ → 0 ▸모래운반(상차, 9㎞): 0 → 470㎥	승 인
식재	○잔디광장 진입부 잔디 보완 필요 ○잔디광장에서 한강 조망 등 개방감 필요	○ 잔디광장 잔디 훼손지역 잔디 식재 반영 ▸잔디식재(평떼): 0 → 470㎡ ○ 해당화 위치 조정 ※ 위치 조정(물량 변경 없음)	승 인

▢ 계략 공사비 : 금902,560천원(증50,000천원)

구 분		당 초	공 사 비 증 감			변경 (2차-당초)	비 고
			1차	2차(금회)	누계(2차-1차)
총 공 사 비		852,560	827,401	902,560	75,159	50,000
도급비	순공사비	580,258	565,511	621,345	55,834	41,087
	제경비	207,941	200,463	218,807	18,344	10,866
	도급액	788,199	765,974	840,152	74,178	51,953
관급자재비		64,361	61,427	62,408	981	△1,953

▢ 보고자 검토의견

○ 위와 같이 승인 통보하여 선 시공후 추후 설계변경 시행 등 공사시행에 철저를 기하고자 함.

붙임 : 공사현장 실정보고 승인요청 공문 1부.  끝.