투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 토목 시설물 유지보수공사 설계변경(1회) 시행

1. 우리 센터에서 시행중인 “2020년 토목시설물 유지보수공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2020년 토목시설물 유지보수공사

나. 공사기간 : 2020. 3. 02 ~ 2020. 12. 23

다. 도 급 자 : 성복공영(주)

라. 변경사유 : 작업지시 사항 반영(1~3차 작업지시)

마. 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비,수선유지비

바. 공 사 비

구 분	당초금액	변경금액	증‧감	비 고
총공사비	414,405,360	414,405,360	-
도급비	407,988,900	407,988,900	-
관급자재비	6,416,640	6,416,640	-

사. 주요변경사항

구 분	당초금액	변경금액	증‧감	비 고
1, 토공	25,685,835	4,378,148	-21,307,687
2. 구조물공	49,233,520	88,652,108	39,418,588
3.포장공	53,046,583	22,581,101	-30,465,482
4.보수공	89,966,060	129,970,088	38,004,028
5.조경공	25,364,735	1,514,855	-23,849,880
6.부대공	1,262,952	1,210,402	-52,550

아. 물량 변경 내역 : 붙임 1 설계변경 사유서 참조

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설게변경 내역서 1부.  끝.

주무관	김승조		시설팀장	代최기문		시설보수과장	조선행		난지물재생센터소장	06/17 한성현
협조자
시행	시설보수과-2065	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 426 난지물재생센터 시설보수과	/
전화	02-300-8558	/전송	02-300-8587	/	ksjseoul@seoul.go.kr	/	대시민공개