문서번호	조경과-4716
결재일자	2020.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
이옥하	김강환	대결 06/18 오성문		전결
협 조	동물원장		어경연
	전략기획실장		전진수
	총무과장		유연호
	동물기획과장		代김연주
	주무관		한상길

「서울대공원 맹금사 환경개선공사」 조경분야 실정보고

현안사항 검토보고

2020. 6.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「서울대공원 맹금사 환경개선공사」 조경분야 실정보고

현안사항 검토보고

「서울대공원 맹금사 환경개선 공사」감독업무 수행 중 시공사로부터 조경분야 변경에 대한 실정 보고가 있어 이를 검토 보고함.

1		공사개요

□ 위     치 : 서울동물원 맹금사 일원

□ 공사규모 : 면적 약 20,000㎡ (맹금사 8,400㎡, 가금사 11,600㎡)

- 토목)독수리, 흰꼬리수리, 콘돌 등 총 9종 방사장 조성, 관람로 조성

- 조경)식재공사 및 조경시설물 설치

□ 공사기간 : 2019. 11. 1.~ 2020. 7. 30.

□ 공 사 비 : *****************************************

※ 차수별 공사비 내역                                          (단위:원)

구 분	총 공사비	도급비	관급비	비 고
합 계	*************	*************	***********	******************
1차분	*************	*************	***********	’19.11.1.~’20.7.30.
2차분	***********	***********	*	’20. 2.5.~ ’20.7.30.

□ 시 공 사 : *****************, ***************

2		현안사항 (실정보고내용)

1. 기존수목 처리 방안 변경 ⇒ 기존 교목 최대한 활용

○ 동물 복지를 위해 사육사 요청에 따라 제거 수목 일부를 고사목으로 활용

○ 대형목 존치 등 현장 여건에 따라 이식 및 제거 수목 수량 변경

☞ ***********************************

○ 개략 공사비 증·감 내역 : **********

- 세부 수량 변경 : *************************************

2. 당초 미반영 된 관람객 및 동물들의 안전을 위한 비관람지역 차폐수목 식재 및 관람로 식재 수목 변경

○ 동물원 주 관람로에서 노출되는 비관람지역인 뒷방사장(격리사)과 주 전시장 철망 주변에 동물 복지 및 관람객 안전을 위해 수목으로 차폐 필요

○ 이용객이 계절감을 느낄 수 있도록 동물원 주 관람동선에 왕벚나무 등 식재

○ 개략 공사비 증·감 내역 : ************

- 세부 수량 변경 내역

구 분		규 격	단위	수 량			비 고
				당 초	변 경	증 · 감
계				*****	*******	*******
차폐용 수목	****	*********	주	**	***	***
	*****	*********	주	*	**	**
	****	*********	주	*	*****	*****
계절감 느낄 수 있는 화목류 식재	****	********	주	**	**	*
	*****	*********	주	***	*	****	소량 수종 조팝으로 교체
	****	*********	주		***	***

☞ 현황사진

동물원 주 관람로에서 노출되는 흰꼬리수리 격리사 차폐 필요	비관람지역 관람객 접근 방지를 위한 흰꼬리수리 방사장 철망 주변 차폐 필요

동물원 주 관람로에 노출되는 독수리 격리사 차폐 필요	관람로에서 노출되는 독수리 격리사, 소형맹금2 차폐 필요

동물원 주 관람로에서 노출되는 콘돌 격리사 차폐 필요	동물원 주 관람로에서 노출되는 콘돌 격리사 차폐 필요

동물원 주 관람로에서 노출되는 소형맹금1 격리사 차폐 필요	동물원 주 관람로에서 노출되는 소형맹금2 격리사 차폐 필요

3		검토 및 회신내용

□ 검토 및 회신내용                                             (단위: 천원)

연번	실 정 보 고 내 용	검 토 및 회 신 내 용	개략공사비 (증·감)
	계		*******
1	이식 및 제거 수목 변경, 고사목 활용 수량 변경	○ ***********************************************	*******
2	비관람지역 차폐를 위한 식재 추가 및 화목류 변경 식재	○ ********************************************	*******

4		조치의견

□ 조치의견

◯ ********************************************************************************

◯ ***************************************

□ 예산현황                                                                   (단위: 천원)

예산과목	사 업 명	예 산 액	집행액 (예정액)	금회사용액	잔 액
합 계		*******	*********** ******* ********	******	*******
생태적동물사조성 및 전시 환경개선(시설비)	연차별동물사리모델링 추진 맹금사 환경개선 2차년도 공사 및 전시	*******	*********** ******* *********	******	*******

붙 임 : 실정보고서 1부.  끝.